문서번호	배수과-9828
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
양윤선	이용구	최진석	12/17 구아미
협 조

『광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역』 준공기한 연기 보고서

2018. 12.

상수도사업본부

급  수  부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	착수보고회의 (’18. 10. 19.)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역』

준공기한 연기 보고

「광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 광암배수관로 직접조사, 설계경제성(VE) 심사 결과 및 설계심의 결과를 설계에 반영하기 위한 처리기간이 소요되어 용역 준공기한을 연기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역

□ 용역내용

○ 용역목적 : 노후되고 수요량 대비 대형관이 매설되어 있는 광암정수장 수계 배수관로에 대해 현실적이고 효율적인 정비방안 도출을 위한 용역

○ 용역개요 : 배수관로 부설 : D1000㎜ ~ D1,500㎜, L=22㎞

- 광암 → 우면산 관로(D2,200㎜, L=11㎞)

- 광암 → 청담관로(D1500㎜ ~ D2,200㎜, L=11㎞)

○ 총사업비 : 43,000백만원

□ 용역기간 : 2018. 7. 31. ~ 2019. 7. 30.

□ 용역업체 : **************

□ 계약금액 : ***********

Ⅱ		추진경위

□ 용역 발주                                          : ’18. 5. 30.

□ 낙찰자 결정 및 계약체결                            : ’18. 7. 19.

□ 용역 착수                                          : ’18. 7. 31.

□ TF팀 회의                                         : ’18. 9. 13.

○ 참석자(33명) : 급수부장 등 본부 및 TF팀원(21명), 용역사(6명)

○ 주요내용 : 용역의 목적 및 과업 설명, TF팀 부서별 의견 수렴

□ 착수보고회 개최                                   : ’18. 10. 19.

○ 참석자(23명) : 부본부장, 급수부장 등 본부 및 TF팀원(15명),

분야별 외부 자문위원(4명), 용역사(4명)

○ 주요내용 : 광암수계 배수관로 정비계획, TF팀 회의 주요 검토의견 계획 및 단계별 과업수행 계획 등

□ 공정보고 시행                                 : ’18. 11. ~ 12.

※ 급수부장, 본부 TF팀원 및 용역사 월별 공정보고 시행

Ⅲ		준공기한 연기사유

□ 광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계를 위해서는 광암배수지 배수관로를 직접조사 하여 갱생, 교체 등 검토 필요

○ 착수보고 과정에서 관로 직접조사를 통한 노후도 평가 필요성이 제기되어, 서하남IC 입구에서 발생한 광암배수지 배수관로(D2200㎜/D700㎜퇴수, 청담계통)의 누수복구를 위한 연결공사 완료 후 수계전환하여 직접조사를 12월에 시행코자 하였으나, 동절기 연결공사에 어려움이 있어 연결공사가 2019년 3월 시행으로 변경되어 용역기간 변경필요.

○ 연결공사예정 : ’19. 3.(강동수도사업소 시행)

○ 설계경제성 심사(VE) 시행에 따른 소요기간 필요

- 총공사비 100억원 이상인 공사의 기본설계 사항으로 설계경제성 심사   (VE) 시행후 용역에 반영(기본 및 실시설계의 설계경제성 심사는 각각   1회 이상 시행)

※ 건설기술 진흥법 시행령 제75조

○ 설계심의 시행에 따른 소요기간 필요

- 총공사비 100억원 이상인 공사의 기본설계 사항으로 설계심의 시행 후   용역에 반영필요(기본 및 실시설계의 설계심의(기술심사담당관)는 기본   설계 완료시점에서 시행)

※ 서울시 건설기술심의위원회 조례 제3조, 15조

※ 서울시 건설기술심의위원회 조례시행규칙 제7조

Ⅳ		준공기한 연기

○ 당초(1차) : 2018. 7. 31. ~ 2018. 12. 31.

○ 당초(전체분) : 2018. 7. 31. ~ 2019. 7. 30.

○ 변경(1차) : 2018. 7. 31. ~ 2019. 5. 31.(151일 연기)

○ 변경(전체분) : 2018. 7. 31. ~ 2019. 12. 31.(154일 연기)

○ 연기사유 귀책소재 : 우리본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

○ 계약금액은 변경없음.

붙임 : 1. 건설기술 진흥법 시행령(제75조)

2. 서울특별시 건설기술심의위원회 조례 시행규칙(제7조)

3. 착수보고회 결과보고(배수과-8424)

4. 광암배수지 배수관로 수계전환 계획보고(시설관리과-21236). 끝.