문서번호	교량안전과-22092
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장
김용태	박동욱	12/17 김종호

“개봉고가 성능개선 실시설계용역”

설계변경 검토 보고

2018. 12

교량안전과

“개봉고가 성능개선 실시설계용역”

설계변경 검토 보고

“개봉고가 성능개선 실시설계용역”과 관련하여, 유관부서 협의(교통·시공) 중 추가 검토사항 발생으로 설계변경 사항을 검토 보고 드림.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 개봉고가 성능개선 실시설계용역

○ 용역기간 : ‘17.6.1. ~ ‘18.12.31.

○ 계약금액 : 668,816,700원

○ 용 역 사 : (주)경동엔지니어링 외 2

2		추진경과

○ ‘17. 6. 1. : 용역계약 및 착수

○ ‘18.11.30. : 건설기술심의

○ ‘18.12. 5. : 설계 VE

○ ‘18.12. 6. : 철도 횡단 심의

3		보고내용

○ 철도입체교차심의에서 제시된 의견 검토를 위한 추가 검토 기간 필요

− 경인선을 횡단하는 고가차도 및 보행육교 공사와 관련하여 철도입체교차 시설심의(‘18.12.6.)결과 조건부채택으로 회신(‘18.12.14.)받았으나

− 심의위원의 검토 요청사항이 있어, 검토기간 및 해당 심의위원별 확인 완료 후 조치계획 제출 등 심의 완료를 위한 추가적인 과업기간이 필요함.

· 최근 오송역 및 강릉역 KTX 사고 등으로 추가적인 안전대책 수립을 요구함

○ 관련 절차 이행 중 자문수당 등 추가 발생

− 당초 용역 발주시 미포함되었으나, 관련 규정(추정공사비 일정금액 이상, 과선구간)에 따라 설계VE(‘18.11.26~12.5) 및 철도입체교차심의 (‘18.12.6)를 이행하여

− 절차 이행중 발생한 외부위원의 심사 및 자문수당이 추가적으로 필요함.

4		조치계획

○ 철도구간 심의 의견 반영을 위한 추가 검토기간 소요 및 자문수당 지급을 위해 용역 설계변경을 시행하고자 함.

− 용역 과업기간 2개월 연장

− 용역 계약금액 조정(기 자문회의 수당지급액 정산 및 추가 소요액 반영)

· 중차량노선 시설물 성능개선 사업의 잔여 사업비를 활용하여 설계변경

[예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 중차량노선 시설물 성능개선, 시설비]

<변경 내역>

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약기간	‘17.6.1.∼‘18.12.31.	‘17.6.1.∼‘19.2.28.	2개월
계약금액	668,816,700원	678,918,910원	증10,102,210원

5		행정사항

○ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(→재무과)

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 심사수당 지급요청서(설계VE) 2부.

3. 입체교차시설 횡단심의 수당 지급요청서(철도) 2부.  끝.