투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	「2018 지방폐교활용 가족자연체험시설 소방공사」설계변경(정산) 계약 의뢰

1. 시설과-3218(2018.12.17.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인『2018 지방폐교활용 가족자연체험시설 소방공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 계약 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2018 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 소방공사

나. 공사기간 : 2018. 10. 31. ~ 12. 29.

다. 도 급 비 : 17,700,000원

라. 도 급 자 : (주)영남엔지니어링 대표 류병기

마. 도급비 변경내역(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증/감	비 고
도 급 비	17,700,000	18,260,000	증) 560,000

바. 예산과목: 학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임  1. 설계변경(정산) 검토보고서 및 변경(정산) 설계서 각 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이재홍		시설관리팀장	김영균		시설과장	12/17 진병규
협조자	경리팀장	곽선아
시행	시설과-3223	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 2층	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	hong2495@seoul.go.kr	/	부분공개(5)