투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

1. 시설과-3205(2018.12.17.)호 및 시설과-3200(2018.12.14.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인 『보라매공원 테마 물놀이터 조성공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 및
준공기한 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사

나. 도 급 액 : 금260,933,900원(금이억육천구십삼만삼천구백원)

다. 도 급 자 : ***************

라. 공사내용 : 물놀이형 수경시설 및 기계설비 설치 등

마. 공사비 변경내역

구 분		소요 금액				비고
		당 초	변경	증 / 감
도급비	공급가액	237,212,637	260,909,091	증	23,696,454
	부가가치세	23,721,263	26,090,909	증	2,369,646
	계	260,933,900	287,000,000	증	26,066,100

바. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비(401-01)

사. 준공기한 연기

- 당  초 : 2018. 09. 10. ~ 2018. 12. 22.

- 변  경 : 2018. 09. 10. ~ 2019. 04. 30.

- 지체상금 부과여부 : 미부과 (연기 귀책소재 : 동부공원녹지사업소)

붙   임 :  1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 변경설계서 제출(서울시설공단) 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 제비율검증 확인서 1부.

5. 준공기한 연기 검토보고 1부.

6. 준공기한 연기 요청(서울시설공단) 1부.  끝.

	시설과장
주무관	여은솔		시설관리팀장	김영균		시설과장	12/17 진병규
협조자	경리팀장	곽선아
시행	시설과-3216	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 시설과 (신대방동)	/
전화	02-2181-1159	/전송	02-2181-1169	/		/	부분공개(7)