“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경 및 변경계약 요청 (2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)외 4개소 건설폐기물 처리용역)

우리 부서에서 시행중인 「2018 교량시설물 일상유지보수공사(강남)외 4개소 건걸폐기물 처리용역」과 관련하여 아래와 같이 설계변경 및 변경계약을  요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 개   요

○ 계약건명 : 2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)외 4개소 건설폐기물 처리용역

○ 계약일자 : 2018. 05. 03

○ 준공기한 : 2018. 12. 31

○ 계약상대자 : 태성용아개발*외 1

나. 설계변경 내역

구 분	용역비(원)			비고
	당초	변경	증·감
총 용역비	**********	**********	*************	부가세 포함

다. 설계변경 사유 : 공사별 폐기물처리물량 증·감

라. 예산과목(지출품의 금액)

○ 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물일상유지보수, 시설비***************

○ 교량관리, 일반교량관리, 숯내교 보수공사, 시설비**************

○ 교량관리, 일반교량관리, 금천교 보수공사, 시설비**************

○ 교량관리, 일반교량관리, 보라매고가 보수공사, 시설비**************

○ 교량관리, 일반교량관리, 도림천고가 보수공사, 시설비***************

○ 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 내진보강공사, 시설비************

붙임 : 방침서 / 설계변경 내역 / 합의각서 각 1부. 끝.

	교량안전과장
주무관	이회진		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	12/17 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-22052	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 6)