문서번호	교량안전과-22039
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		이홍재	12/17 김종호
협조

「2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)외 4개소 건설폐기물 처리용역」

설계변경 시행계획 보고

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

「2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)외 4개소 건설폐기물 처리용역」

설계변경 시행계획 보고

『2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)외 4개소 건설폐기물 처리용역』 설계변경 시행계획을 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 건설폐기물 수량집계표 및 폐기물내역서 보고(1종교량 제18-406호, ‘18.12.11)

□ 건설폐기물의 처리등에 관한 업무처리지침(환경부예규 제629호, ‘18.01.16.)

Ⅱ		용역개요

□ 용 역 명 : 2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)외 4개소 건설폐기물 처리용역

□ 용역기간 : ‘18. 05. 04. ~ ’18. 12. 31.

□ 용 역 사 : **********

□ 용 역 비 : *********

□ 용역내용

○ 건설폐기물 수집, 운반 : 3,900톤

- 폐콘크리트 200톤, 폐아스콘 3,700톤

○ 건설폐기물 중간처리 : 3,900톤

- (폐콘크리트 200톤, 폐아스콘 2,996톤, 혼합폐기물 704톤)

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 공사별 폐기물처리물량 증·감

□ 수량변경 현황

구 분	폐콘크리트(톤)			폐아스콘(톤)			혼합건설폐기물(톤)
	당초	변경	증·감	당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
합 계	***	***	******	*****	*****	******	***	***	*******
일상유지	**	*	******	***	**	******	***	*	******
숯 내 교	*	**	******	***	***	******	**	***	******
금 천 교	**	**	******	***	***	******	***	***	******
도림천고가	**	**	******	*****	*****	******	***	*	******
보라매고가	**	***	******	***	***	******	***	***	******
양 화 교	*	**	******	*	*	*	*	*	*

□ 용역비 증감 현황

구 분	용역비(원)			비고
	당초	변경	증·감
총 용역비	**********	**********	*************	부가세 포함
일상유지	**********	*********	*************
숯 내 교	**********	**********	*************
금 천 교	**********	**********	*************
도림천고가	**********	**********	*************
보라매고가	**********	**********	*************
양 화 교	*	*********	*************

Ⅳ		조 치 방 안

□ 상기 검토 결과와 같이 설계변경 및 정산하고자 함

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2018. 12. 18 : 설계변경 및 변경 계약

□ 2018. 12. 21 : 용역 준공

붙임 : 건설폐기물 수량 및 폐기물처리내역 보고 / 설계변경 내역서 각1부. 끝.