문서번호	공원기획과-3869
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원기획과장	공원부장
곽영만		김호규	12/18 김인숙
협조
	총무과장		代임종배

『2018년 한강공원 난지캠핑장 보수정비공사』

설계변경 시행 보고

2018. 12.

공 원 부

(공원기획과)

2018년 한강공원 난지캠핑장 보수정비공사

설계변경 시행 보고

우리부에서 시행 중인『2018년 한강공원 난지캠핑장 보수정비공사』와 관련 신규 공종 및 수량 조정 등이 발생되어 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공원기획과-3618(2018.11.27.) 공사감독 보고

Ⅰ		공사개요

□ 시설공사

○ 공 사 명: 2018년 한강공원 난지캠핑장 보수정비공사

○ 위    치 : 서울시 마포구 한강난지로 28(난지캠핑장)

○ 공사기간 : 2018. 10. 4. ~ 12. 21.

○ 공사내용 : 철거공사 등 6 개 공종

○ 공 사 비 : 금 689,960천원(도급비 245,343천원, 관급자재비 444,617천원)

○ 도 급 자 :******************************

○ 설계변경 내용

구 분	공 종	당 초	변 경	변경사유
철거 공사	흙콘크리트 포장 철거	88㎡	224㎡	공사현장 여건에 따른 물량 변경
	투수블럭 철거	0㎡	490㎡
포장 공사	잔디보호메트	680㎡	780㎡	공사현장 여건에 따른 물량 변경
	포장경게석	111M	81M
	마사토 포장	0㎡	269㎡
시설물 공사	지상식 소화전	2개소	0개소	2019년 난지캠핑장 정비계획에 반영 추후 재검토
	관정개발	1개소	0개소
	화장실, 샤워실 진입램프	15.62㎡	8.03㎡	공사현장 여건에 따른 물량 변경
	화장실, 샤워실 케노피 설치	0	6개소

구 분	공 종	당 초	변 경	변경사유
시설물공사	음수대 및 세족장 변경	4개소	2개소	공사현장 여건에 따른 물량 변경
	메쉬휀스 설치	0경간	4경간
	방부목 흙막이	0M	16M
	캠핑장 이용 안내판	0개	1개	감사지적사항 처리
식재 및 이식공사	눈주목 식재	900주	1,200주	공사현장 여건에 따른 물량 변경
	화살나무 식재	450주	1,540주
	줄사철 식재	100주	150주
	잔디 식재	680㎡	1,210㎡
	해당화 식재	0주	740주
	느릅나무 이식	0주	9주
	느티나무 이식	1주	25주
	측백나무 이식	0주	92주
	화살나무 이식	0주	165주
상수인입 공사	급퇴수조절밸브함 설치	10개소	11개소	공사현장 여건에 따른 물량 변경
	배수용 STS강관	138M	0M
오수처리 공사	오수관	230M	260M	공사현장 여건에 따른 물량 변경
	엘보(90˚)	6개	13개
	TEE	1개	4개
	연결소켓	0개	45개
분전반 터파기	터파기	0㎥	700㎥	화장실, 샤워실 전기 인입용 전선 매립
	되메우기	0㎥	700㎥
관급자재	잔디보호메트	680㎡	780㎡	공사현장 여건에 따른 물량 변경

○ 사업비 변경내용

구 분		당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비		************	************	***********
도급비	공급가액	************	************	***********
	부 가 세	***********	***********	**********
	도 급 비	************	************	***********
관 급 자 재 비		************	************	************

□ 폐기물처리 용역

○ 용 역 명: 2018년 한강공원 난지캠핑장 보수정비공사 폐기물 처리 용역

○ 위    치 : 서울시 마포구 한강난지로 28(난지캠핑장)

○ 용역기간 : 2018. 10. 8. ~ 12. 21.

○ 용역내용 : 폐기물 처리 1식

○ 용 역 비 : 금 22,843천원

○ 도 급 자 : *************************

○ 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	변경사유
폐콘크리트	589ton	675ton	공사현장 여건에 따른 물량 변경
혼합페기물	4ton	28ton	공사현장 여건에 따른 물량 변경
페기물 운반	593ton	703ton	페기물 증가에 따른 물량 변경

○ 사업비 변경내용

구 분		당 초	변 경	증 / 감
총 용 역 비		***********	***********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부 가 세	**********	**********	********
	계	***********	***********	**********

Ⅱ		조치계획

□ 상기와 같이 설계변경 시행하여 계약부서에 변경 계약 요청

□ 시공(용역)회사에 변경계약 체결 및 공사 준공에 만전을 기하도록 통보

붙임  1. 변경설계내역서 1부.

2. 변경용역내역서 1부.

3. 변경설계도면 1부.

4. 제비율 검증표 1부.  끝.