자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1차) 및 차수별 금액변경 시행[2018년 미아동외 4개동 상수도공사]

우리사업소에서 시행중인 『2018년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속)』건에 대하여 따로붙임과 같이 설계변경(1차) 및 차수별 금액변경을 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 2018년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속)

2. 계약업체 : 탑건테크㈜  대표 김명자

3. 공사기간 : 2018. 5. 8.~ 2018. 12. 10.(총부기기간 : 2018.05.08. ~ 2019.06.30.)

4. 변경내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증감액(원)	비고
총부기금액	488,365,600	488,365,600	-
금회(1차수)계약금액	247,378,300	302,830,000	증 55,451,700	2018년분
2차수계약금액	240,987,300	185,535,600	감 55,451,700	2019년분

5. 설계변경 사유 : 신규공종 및 계약물량 증감사항 발생

6. 예산과목 :

-  상수도사업비용,영업비용,급·배수공사비,신설공사비-21201

-  자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도관-배급수관정비)-21103

-  상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(수도계량기보호통보온재등정비)-23203

-  소방용수시설설치개소수,소방용수시설등의설치 및 보수,소방용수시설 설치-40101

-  자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(소블록배급수관망개선)-21108

붙임 : 1. 설계변경 관련서류 각 1부.  끝.

주무관	박상권		시설관리과장	변재홍		북부수도사업소장	12/18 심말숙
협조자	주무관	박미영		주무관	한경란
시행	시설관리과-22684	(		)	접수		(		)
우	00037	강북구 번2동 377번지	/
전화	02)3146-3393	/전송	02)3146-3439	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)