문서번호	교량안전과-22236
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
송시영		정회평	12/18 김종호
협조

한남대교 보수공사(장기계약-1차분)

설계변경(최종) 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

한남대교 보수공사(장기계약-1차분)

설계변경(최종) 시행계획 보고

한남대교 보수공사(장기계약-1차분)에 대하여 설계변경(최종)시행 및 향후 추진계획을 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 설계변경(제1회) 검토의견서 제출(한남대교 보수공사-장기계속)

(동성감리 18-987, ‘18.12.18)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 한남대교 보수공사(장기계속)

□ 공사기간 : `18.03.23 ~ `20.12.22(1차 `18.12.31)

□ 공사규모

○ 한남대교 상류교 교각(25기) 보수․보강(1차 7기)

□ 사 업 비 : 4,924백만원(1차 1,739백만원)

○ 총차 : 도급비4,645백만원, 관급비268백만원, 이전비11백만원

○ 1 차 : 도급비1,633백만원, 관급비101백만원, 이전비5백만원

□ 연차별 추진계획(장기계속공사)

차수	공사기간	보수․보강내역		비 고
		교각	세부내역
1	`18.03.23 ~ `19.12.31	7기	기둥․코핑 보강, 단면보수	P4,P5,P14,P20,P24,P25,P26
2	`19. 3 ~ `19.12	6기	기둥․코핑 보강, 단면보수	P10,P13,P16,P17,P18,P23
3	`20. 3.~ `20.12	12기	코핑보강, 단면보수	P2,P3,P6,P8,P9,P11,P12,P15 P19,P21,P22,P27

Ⅲ		설계변경 검토

□ 설계변경 사유

○ 염해방지코팅 공종 제외[교량안전과-20009(2018.11.15.)]

○ 교각 점검통로 보강재 설치[교량안전과-19303(2018.11.05.)]

○ 교각 확대구간 단면보수 등 중복 적용 수량 제외

○ 제경비(국민연금, 건강,노인장기,퇴직공제,안전관리비) 정산금액 반영

○ 건설기계 대여금 지급보증서 발급금액 및 하도급대금 지급보증서  발급 수수료는 직불합의서 제출로 정산 제외 등 적정함

□ 물량 증·감 및 신규비목 단가

○ 증·감 된 물량은 계약단가를 적용하고

○ 신규비목은 설계변경 당시 산정단가에 낙찰률(87.745%)를 적용하기로 협의하여 반영함

□ 주요공종 물량 증.감 내역

□ 공사비 증.감 내역

Ⅳ		조 치 계 획

□ 상기 검토결과에 따라 설계변경 및 변경계약 추진 후 준공

처리코자 함

Ⅴ		향 후 계 획

□ ‘18. 12. 20 : 설계변경 및 변경계약

□ ‘18. 12. 21 : 준공검사

붙임  1. 설계변경 검토의견서(감리단) 1부

2. 설계변경 내역서(1차분) 1부

3. 제비율 검증확인서 1부

4. 건설기계 장비 및 하도급 직불합의서 각 1부. 끝.