문서번호	동북권사업단-11197
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	지역협력팀장	동북권사업반장		동북권사업반장
류현석	소영수	곽석권		대결 12/18 곽석권
협 조

- 마들로11길, 상계로변 가로환경개선 기본 및 실시설계 -

용역 준공(정산) 검토 보고

2018. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

- 마들로11길, 상계로변 가로환경개선 기본 및 실시설계 -

용역 준공(정산) 검토 보고

창동·상계 신경제중심지 조성을 위한 마중물사업으로 추진 중인「가로환경개선 기본 및 실시설계」용역 준공(정산) 검토 보고임

Ⅰ		과업 개요

□  위    치 : 도봉구 마들로11길(창동), 노원구 상계로(상계동)

□  규    모 : 마들로11길 L=400m, 상계로 L=634m

□  기    간 : ’17. 6. 14 ~’18. 12. 14.

□  용 역 비 : *******************************

□  과업내용 : 차로수 축소를 통한 보도확장‧정비, 가로시설물 설치 등

Ⅱ		(주요)추진경위

□  ’17.  6. 14. : 용역계약(’7.21 착수보고회 개최)

□  ’17. 12. 12. : 중간보고회 개최

□  ’18. 2. 28. : 제1차 전문가 자문회의 개최

□  ’18.  4.  4. : 준공기한 연기보고

□  ’18. 4.~ 5. : 주민설명회(3회 개최; 4.17, 4.25, 5.4)[공방구간 연계]

○ 광장구간 확보에 따른 도로축소 및 버스, 택시승강장 위치 변경

□  ’18. 6. 14.  : 디자인심의(조건부 동의)[공방구간]

□  ’18. 6. 28.  : 준공기한 연기 보고

□  ’18. 7. 2.   : 교통규제심의(원안가결)[공방구간]

□  ’18. 9. : 제2차(10일), ·3차(21일) 자문회의

□  ’18. 10.~11 : 하나로클럽 앞 주민의견수렴(설명회 2회, 방문설문조사)

□  ’18. 10. 26. : 변경계약 체결(준공기한 연기, 계약금액 조정)

□  ’18. 11. 12. : 제2차 중간보고회 개최

□  ’18. 11. 29. : 하나로클럽 앞 교통규제 심의(서울지방경찰청)

□  ’18. 12. 13. : 하나로클럽 앞 도시디자인 심의(디자인정책과)

Ⅲ		준공내용 및 검토의견

□ 주요 성과

○ 과업의 내용

구 분	마들로11길(도봉구 창동)		상계로(노원구 상계동)
	환승주차장 앞	하나로클럽 앞	차량기지 앞	면허시험장 앞
현황도
과업범위	기본 및 실시설계		기본계획
(주요)개선내용	ㆍ차로유지(6차로) ㆍ광장 및 고가하부 교통섬(보도) 조성 ㆍ고원식 횡단보도 신설 ㆍ택시정류장 1개소 이설	ㆍ차로축소(7⟶4차로) ㆍ고가하부공간 교통섬 (보도) 조성 ㆍ남측 보도 확장 ㆍ고원식 횡단보도 신설	******************* ****************** ****************** ****************** ************

*********************

***************************************

**********************

*******************************

Ⅳ		향후계획

□ 준공검사(감독)조서 제출(동북권사업반→재무과).  끝.