투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	시설공사 설계변경 계약시행 의뢰

1. 공원기획과-3869(2018.12.18.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진하는 아래 시설공사의 설계변경 게약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2018 한강공원 난지캠핑장 보수정비공사

나. 위    치: 한강공원 난지캠핑장(마포구 한강난지로 28)

다. 공사기간: 2018.10. 4. ~ 2018.12.21.

라. 공사개요: 철거공사 등 6개 공종

마. 도 급 자: *************

바. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 / 감
총공사비		689,960,000원	683,727,000원	-6,233,500원
도급비	공급가액	223,501,628원	246,690,000원	23,650,454원
	부가가치세	22,303,954원	24,669,000원	2,365,046원
	계	245,343,500원	271,359,000원	26,015,500원
관급자재비		444,617,000원	412,368,000원	-32,249,000원

- 설계변경 사유: 현장여건에 따른 공종별 물량조정 및 신규 공종 추가 발생

사. 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설물 관리 및 개선, 한강공원 난지  캠핑장 보수·정비, 시설비(100-401-01)

붙임  1. 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경 내역서 및 도면 각 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.

	공원기획과장
주무관	곽영만		공원기획과장	12/18 김호규
협조자
시행	공원기획과-3872	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0847	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(7)