＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 및 차수별 계약금액 변경 시행 (2018년 은평구관내 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2018년 은평구관내 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여

아래와 같이 설계변경(1차)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 : ************

다. 계약기간 : 2018.06.19 ~ 2019.06.30

라. 계약금액(도급비)

1) 1차수 금액변경 내용(2018년도)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	135,833,309	122,464,380	감 13,368,929	아스팔트포장절단 등
부설공	116,529,262	106,406,116	감 10,123,146	스텐관부설공 (D=13mm)등
구조물공	13,328,061	19,673,443	증 6,345,382	대형계량기실 설치공 등
부대공	70,198,911	43,186,264	감 27,012,647	하수도 복구공 등
사급자재비	78,561,214	66,763,677	감 11,797,537	주름마디스텐레스관 (13mm) 등
부가세 및 요율	235,806,725	194,964,520	감 40,842,205
합 계	650,257,482	553,458,400	감 96,799,082

2) 차수별 부기금액 변경

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
도급비	총 부기금액	1,083,762,470	1,083,762,470	증·감없음
	1차(2018년)	650,257,482	553,458,400	감 96,799,082
	2차(2019년)	433,504,988	530,304,070	증 96,799,082

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증·감

바. 최대이행금액 : 500,000,000원(변경없음)

사. 예산과목

상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 신설공사비(급수공사)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후상수도관(배급수관)정비)

재난시스템구축,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설설치및보수비,시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비,지원사업성시설비(보호통보온재등정비)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(소블록 배급수관망 개선)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(유수장애)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 상하수도관교체비(교체장애수전정비)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(배수관소블록 물세척)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비,지원사업성시설비(음수대)

상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 개조공사비(상수도관이설)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(불용관정비)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(간선배관공사)

붙임 1. 설계변경 심의결과서 부.

2. 변경내역서 1부.

3. 변경합의서 1부. 끝.

주무관	신동철		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	김홍준		서부수도사업소장	12/18 박영헌
협조자	주무관	구준모
시행	시설관리과-25984	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3706	/전송	02)3146-3739	/	tls7071@seoul.go.kr	/	부분공개(6)