투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2018년 도로굴착복구공사 외 2건 폐아스콘 처리용역(서부) 설계변경(최종) 시행

1. 도로보수과-11677호(2018.12.18.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하는 ‘2018년 도로굴착복구공사 외 2건 폐아스콘 처리용역(서부)’을 아래와 같이 설계변경(최종)하여 변경계약 및 준공에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2018년 도로굴착복구공사 외 2건 폐아스콘 처리용역(서부)

나. 용역기간 : 2018.04.05. ∼ 2018.12.31.

다. 계약업체 : ********************************

라. 설계변경

○설계변경 금액                                             (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총용역비		207,555,000	282,810,000	증) 72,255,000
도급비	계	207,555,000	282,810,000	증) 72,255,000
	공 급 가 액	188,686,364	257,100,000	증) 68,413,636
	부가가치세	18,868,636	25,710,000	증) 6,841,364

마. 설계변경 사유 : 도로굴착복구공사의 굴착복구의뢰 신청 및 도로굴착시행도로정비공사, 도로함몰예방사업 등의 폐기물운반 및 처리물량 증가 등

바. 예산과목

- 안전총괄본부도로관리과, 도로, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 시설비 및 부대비, 시설비(금252,999,160원)

- 안전총괄본부도로관리과, 도로, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 도로함몰예방사업, 시설비 및 부대비, 시설비(금27,803,840원)

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리,(도시개발특별회계), 사천교성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비(금2,007,000원)

붙임 : 1. 설계변경(최종) 시행계획보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 수량산출서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 감리단 설계변경 검토보고서 1부.

6. 사천교성능개선공사 폐기물처리방안 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	임동운		도로보수과장	12/18 강종훈
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-11695	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 3층 도로보수과(상암동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8352	/전송	02-300-8364	/	lduon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)