투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	서울지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 계약변경의뢰(총괄7회, 11차1회)

1. 도시철도토목부-14696(‘18.12.18)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 수행하고 있는『서울지하철9호선3단계 919공구 건설공사』에 대한 계약변경(총괄7회, 11차1회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

나. 도 급 자 : 삼성물산(주) 외 2개사

다. 예산과목 : 도시기반시설본부 도시철도토목부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,  도시철도9호선 3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

라. 계약변경 현황

(단위:백만원)

구분		총괄(7회)	11차 1회	비고
계약금액	당초	211,191	18,921	-
	변경	215,145	22,875	-
공사기간	당초	‘09.12.31 ~ ‘18.12.31	‘18.02.09 ~ ‘18.12.31	-
	변경	변경없음	변경없음	-

마. 계약변경 사유 : 물량변경 및 도로복구 등 추가공사 시행으로 인한 계약금액 변경 (총괄 7회, 11차1회)

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 감리검토공문 및 시공사 요청공문. 1부.

3. 설계내역서(총괄7회, 11차1회). 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	정중규		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	12/18 정대현
협조자	주무관	조태현
시행	도시철도토목부-14705	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 9층	/
전화	772-7242	/전송	772-7306	/		/	부분공개(5 6)