문서번호	시설과-11850
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
윤걸		12/18 代최이영
협 조

계약금액조정 심사 소위원회 개최

(폐기물발생에 따른 토공물량 변경 외 8건)

2018. 12.

상수도사업본부

(시설과)

「우면산가압장 급수체계 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

(폐기물발생에 따른 토공물량 변경 외 8건)

1
		공사개요

○ 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 증설 2,300㎥(기존 3,300㎥)

○ 공사기간 : 2017. 12. 13.~2020. 5. 30.

○ 도 급 비 : 1,977백만원(2차수 : 889백만원)

○ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설 대표 임진규 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 대표 이인제 외 1개사

2
		계약금액조정 내용

1. 폐기물 발생에 따른 토공 물량변경

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	42,966,000원	33,484,000원	감 9,482,000원

2. 지장수목 처리방안

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	0원	1,795,000원	증 1,795,000원

3. 배수지 기초변경

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	42,580,480원	16,500,000원	감 26,080,480원
도급비	36,147,000원	16,500,000원	감 9,647,000원
관급자재비	16,433,480원	0원	감 16,433,480원

4. 기존시설물 저촉에 따른 배관실 규격 변경

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	415,798,173원	418,880,000원	증 3,085,827원

5. 배관실 슬리브 자재 변경

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	1,103,520원	9,944,000원	증 8,840,480원
도급비	121,000원	9,944,000원	증 9,823,000원
관급자재비	982,520원	0원	감 982,520원

6. 안전관리계획서 작성비 반영

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	0원	3,850,000원	증 3,850,000원

7. 교통신호수 반영

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	0원	2,387,000원	증 2,387,000원

8. 철근운반비 및 슬래브 간격 유지철근 반영

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	0원	10,113,140원	증 10,113,140원
도급비	0원	8,638,300원	증 8,638,300원
관급자재비	0원	1,474,840원	증 1,474,840원

9. 방수층 보호재 반영

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	0원	20,818,600원	증 20,818,600원

3
		설계변경 근거

○ 지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1.설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2) 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

4
		소위원회 개최

○ 일  시 : 2018. 12. 18.(화) 14:00 ~ 15:00

○ 장  소 : 시설안전부 회의실

○ 심사위원

- 팀 장 : 시설과장

- 팀 원

소 속	직 급	성 명	비 고
시 설 과	6급	최 이 영
시 설 과	7급	차 승 현
시 설 과	7급	김 민 식

붙임 : 실정보고서 및 내역서 1부.  끝.