문서번호	도로보수과-11679
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	12/18 이학구
협 조
	주무관			이상하

『‘18/’19 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경(1회) 검토보고

2018.12.

『‘18/’19 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경(1회) 검토보고

우리사업소에서 시행하는 『‘18/’19 제설작업 용역(장기계속)』과 관련하여 추가 예산재배정에 따른 예산집행계획 및 설계변경을 검토하고 결과를 보고함

Ⅰ		관련근거

□ 도로관리과-747(‘18.1.15.)호

○ 제설대책 추진에 따른 예산 재배정(1차)

□ 도로관리과-15912(‘18.10.24.)호

○ 제설대책 추진관련 예산재배정

Ⅱ		용역개요 및 예산현황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ’18/‘19 제설작업 용역(장기계속)

○ 용역기간 : ’18.11.15.~‘19.3.15.(1차분 ’18.11.15.~12.31.)

○ 용 역 비 : 총차분 금305,218,940원(1차분 54,912,000원)

○ 계 약 자 : 위상건설(주)(대표 : 마용철)

□ 예산배정현황

(단위 :천원)

예산과목		예산액	배정일
도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,제설대책추진,사무관리비	제설작업 용역비	320,000	‘18.01.15.
	제설대책 상황실 운영비	10,000
도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,제설대책추진,사무관리비	제설작업 용역비	20,000	‘18.10.24.

Ⅲ		변경내용

□ 사업비 변경내용

○ 총차분

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총용역비	305,218,940	308,682,000	증 3,463,060
도 급 비	305,218,940	308,682,000	증 3,463,060

○ 1차분

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총용역비	54,912,000	83,271,000	증 28,359,000
도 급 비	54,912,000	83,271,000	증 28,359,000

□ 설계변경 사유

○ 제설용역 예산 추가재배정에 따른 비상근무 계약내역 2차분을 1차분에 반영

- 2018년도(2차)에 포함시킨 일부 비상근무 내역을 1차분에 반영(‘18.11.15.~12.16.)하여 설계변경 시행(1회)

※ 증가액(28,359천원)은 낙찰차액(8,359천원) 및 추가재배정액(20,000천원)에서 사용하고자 함

- 2018년도 1차분 비상 실근무에 따른 물량 증ㆍ감 내역

공종	규격	단위	변경내역				비고
			당초	변경	증ㆍ감
상황반장	주간	hr	20	48	증	28
	야간	hr	15	22	증	7
상황대기원	야간	일	25	31	증	6
제설작업원	주간	hr	40	84	증	44
	야간	hr	30	44	증	14
제설작업운전원	주간	hr	80	126	증	46
	야간	hr	60	61	증	1
제설장비 상시대기	굴삭기(0.6[eqn: m ^{3}])	hr	40	224	증	184
제설작업	굴삭기(0.6[eqn: m ^{3}])	hr	6	15	증	9
덤프트럭(월임대)유류비		hr	47	81	증	34
덤프트럭 월임대	15톤 덤프 (유류비 제외)	월	0.7	1.1	증	0.4

Ⅳ		조치 및 향후계획

□ 조치계획

○ 비상 실근무 반영에 따른 물량 증ㆍ감분에 대한 1차분 도급비 증가액은 금회(’18.11.20.)재배정 예산 및 낙찰차액을 사용하여 설계변경 시행하고 제설대책 추진에 만전을 기하고자함.

○ 기상에 따른 비상근무는 예측이 곤란하여 ‘18.12.17.부터 발생하는 제설작업 용역비는 2019년도 2차분에 포함하여 정산조치 하고자 함.

□ 향후계획

○ 본 제설작업 용역은 장기계속 계약으로 제설대책기간 종료시 설계변경 및 정산처리 예정

붙임 1. 관련공문 2부

2. 설계변경 내역서 2부(총차분, 1차분).  끝.