문서번호	토목부-21446
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	12/18 代이동훈
협조
	주무관		김동현

설계변경(전체3회, 3차 2회) 검토보고

【중랑천 초안산 앞 보행교량설치공사 건설사업관리용역】

2018. 12.

설계변경(전체3회, 3차 2회) 검토보고

【중랑천 초안산 앞 보행교량설치공사 건설사업관리용역】

철도보호지구 행위신고 협의 지연 등에 따라 공사가 연장되어 건설사업관리용역 기간 등에 대한 설계변경 검토임.

※ 관련근거 : 대본(감본) 제 18-295호(2018.12.17.)

1		용역개요

○ 용 역 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량설치공사 건설사업관리용역

○ 용역규모 : 닐센아치교(L=251m, B=4.5m), 교각 7개소, E/V 3개소 등

○ 용 역 비 : 900,000천원(3차 : 400,000천원)

○ 용역기간 : ‘16.05.16. ～ ’18.12.31.(3차 ‘17.11.08. ∼ ’	18.12.31.)

○ 용 역 사 : ㈜대한콘설탄트, ㈜한맥기술

2		설계변경 검토

○ 변경내역

구 분		당 초	변 경	비 고
전체 (3회)	기간	********************** ******	********************** ********	*******
	금액	************	**************	**************
3차 (2회)	기간	*********************** ******	*********************** ******	******
	금액	************	************	**************

○ 설계변경 사유(전체 3회, 3차 2회)

- 철도보호지구 행위신고 절차 지연 및 협의 결과에 따른 공사 지연

- 노원구청 및 인근주민 민원사항에 따른 공사 지연

○ 감리원 배치투입 현황(전체 3회 변경)

구 분	당 초	변 경	비고(증,감)
책임기술자(1인)	29.8개월	35.3개월	증) 5.5개월
토목기술자(1인)	30.5개월	35.5개월	증) 5.0개월
강교기술자(1인)	5.8개월	5.8개월	-
전기기술자(1인)	2.0개월	2.0개월	-

○ 11차분(1회) 감리원 배치투입 현황

구 분	당 초	변 경	비고(증,감)
책임기술자(1인)	12.8개월	18.3개월	증) 5.50개월
토목기술자(1인)	13.8개월	18.8개월	증) 5.00개월
강교기술자(1인)	1.50개월	1.50월	-
전기기술자(1인)	2.0개월	2.0개월	-

○ 감리단 검토의견

- 노원구청 및 지역주민들의 요청에 의하여 결정된 월계역사 연장구간 60m 중 36m(60%)가 철도보호지구 내 위치하고 있어 한국철도시설공단과의 협의 지연으로 인하여 공사기간이 연장된 실정으로 품질, 안전, 공사, 공정, 민원관리를 위한 건설사업관리용역의 공기연장이 필요한 실정임

3		조치의견

○ 현장상황, 감리단 검토의견 등을 종합적으로 고려했을 때 건설사업관리용역의 연장이 타당하여 설계변경(전체 3회, 3차 2회)을 실시하여 감리업무 추진에 만전을 기하고자함.

붙  임  1. 설계변경 감리 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(전체 3회, 3차 2회) 1부.

3. 설계변경 합의각서 1부.  끝.