문서번호	도시철도토목부-14696
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
정중규		최진규	12/18 정대현
협 조
	시설전기과장			이덕한
	건축계획과장			최달수
	설비계획과장			이명수
	주무관			조태현

「9호선 919공구 건설공사(총괄7회,11차1회)」

계약금액 조정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「9호선 919공구 건설공사(총괄7회,11차1회)」

계약금액 조정 검토 보고

『서울지하철9호선 3단계 919공구 건설공사』관련 총괄(7회) 및 11차(1회)공사 계약금액 조정에 대하여 검토함.

※ 관련근거 : 수성제2018-4153호(2018.12.17)

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

❍ 구    간 : 송파구 삼전동(구 잠실병원) ~ 석촌역 사거리

❍ 규    모 : 총연장 1,560m

- 터널 1,134m, 본선개착 96m, 정거장 2개소 330m

❍ 공 사 비 : 211,191백만원

❍ 기    간 : 2009.12.31. ~ 2018.12.31.

❍ 시 공 사  : 삼성물산(주)외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜수성엔지니어링외 4개사

□ 계약현황

(단위 : 백만원)

구 분	총괄	기준공 (1~10차)	11차 (금회)	비고
공사금액	211,191	192,270	18,921	-
공사기간	‘09.12.31 ~’18.12.31	‘09.12.31 ~’18.12.31	‘18.02.09 ~’18.12.31	-

Ⅱ		건설사업관리자 보고내용

□ 총괄(7회) 조정현황

(단위:백만원)

구 분	공사금액			비 고
	당초	변경	증감
계약금액	211,191	215,145	증)3,954	-
계약기간	‘09.12.31 ~’18.12.31	‘09.12.31 ~’18.12.31	-	-

□ 11차 1회 조정현황

(단위:백만원)

구 분	공사금액			비 고
	당초	변경	증감
계약금액	18,921	22,875	증)3,954	-
계약기간	‘18.02.09 ~’18.12.31	‘18.02.09 ~’18.12.31	-	-

◀ 내역 조정현황

(단위:백만원)

계약금액내 조정(A)			추가 금액(B)			계(A+B)
계		- 2,897	계		+ 6,851	+ 3,954
토목	소계	- 2,294	토목	소계	+ 6,851
	쉴드터널 갱구부 보강 조정	+ 181		보도 복구	+ 159
	931S2E2환기구 규모조정	+ 920		차도 복구	+ 139
	흙막이 가시설 변경	- 582		가로등 복구	+ 261
	석촌역 하부 가시설 변경	- 259		교통신호기 복구	+ 378
	폐기물처리비	- 1,912		강재손료 조정	+ 4,542
	연결통로	- 472		공사용 조명 조정	+ 63
	건설하도급대금지급보증서	- 83		교통정리원 조정	+ 285
	이설비(가로등,신호등)	87		물푸기 조정	+ 145
건축	소계	+ 328		계측비 조정	+ 178
	승강장 축소부 마감재 설치	+ 90		공사용 울타리 손료 조정	+ 33
	안전구역 신설	+ 20		현장사무실 임대료 조정	+ 287
	기능실 평면 변경	+ 77		사후환경영향조사비	+ 38
	승강장 축소부 양방향도어 설치	+ 5		장비대여대금지급보증수수료	+ 54
	출입구 캐노피 신설	+ 573		연도변 건물 추가조사	+ 93
	벽체마감재 변경	- 265		6회 물가변동	+ 523
	자전거 주차장 조정	- 15		석촌지하차도 조사비	- 327
	933정거장 천창 조정	- 158

계약금액내 조정(A)			추가 금액(B)			계(A+B)
기계	소계	- 931		소계
	932정거장 본선설비공사	+ 44
	932정거장 승강설비공사	+ 3
	933정거장 본선설비공사	+ 3
	932정거장 장비설치공사	- 32
	932정거장 스크린도어 설치공사	- 450
	933정거장 장비설치공사	- 4
	933정거장 승강설비공사	- 271
	933정거장 스크린도어 설치공사	224
전기	소계	0
	UPS용량 및 조명회로변경 전기공사	+ 174
	승강장 축소에 따른 전기공사	+ 28
	터널내 비상콘센트 수량조정	+ 13
	정거장 수익시설설치 전기공사	- 76
	본선환기휀 기동방식 추가 전기공사	- 139

○ 계약금액 조정 사유 : 물량변경 및 도로복구 등 추가공사 시행

□ 건설사업관리자 검토의견

○ 각 분야(토목, 건축, 기계, 전기) 기 실정보고 승인된 공종에 대한 계약금액(총괄 7회, 11차 1회) 조정 사항으로 조정이 적정함

Ⅲ		조치 계획

○ 상기 보고내용과 같이 건설사업관리자가 제출한 계약금액 및 총괄 및 차수공사 계약금액 조정(총괄 7회, 11차 1회) 요청에 대하여 승인하여 예산집행에 차질 없도록 조치코자 함.

붙임  1. 감리 검토공문(시공사 요청공문 포함) 1부.

2. 설계내역서(총괄7회, 11차1회) 각 1부.  끝.