문서번호	기전설비과-9723
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
박종석		조성태	12/19 유성종
협 조
	기획예산과장			김형규
	재무회계과장			김분숙

『영등포정수센터 탈수설비 개량공사(전기분야)』

설계변경 검토 보고

상수도사업본부

(기전설비과)

『영등포정수센터 탈수설비 개량공사(전기분야)』

설계변경 검토 보고

『영등포정수센터 탈수설비 개량공사(전기분야)』 시행 중 시공물량 변경에 따른 물량변경사항과 제경비 정산을 위한 설계변경사항이 있어 검토하여 보고함

□ 공사개요(전기분야)

❍ 공사목적 : 안정적인 급수체계 구축 및 전력비 절감을 위한 공사 시행

❍ 공사규모 : 탈수기 4대, 슬러지펌프 4대, 약품펌프 4대 및 부대설비 1식

❍ 분야별 공사개요

구분	계약자	공사기간	공사금액
계			119,664,300원
1.전기공사	세일통전	’18.9.10. ~ 12.22.	37,302,700원
2.계측제어공사	(주)동화이엔씨	’18.10.2. ~ 12.22.	82,361,600원

□ 설계변경사유

❍ (전기공사) 물량변경 및 제경비 정산을 위한 설계변경 필요

- 배관․배선 물량 변경 및 기존 배관․배선 철거 물량 변경 필요

연번	공 종	규 격	단위	수 량
				당초	변경	증․감
1	강제전선관-노출	아연도 22㎜	m	-	60	(증)	60
2	강제전선관-노출	아연도 42㎜	m	35	-	(감)	35
3	0.6/1kV F-CV케이블	6㎟ × 3C	m	70	240	(증)	170
4	0.6/1kV F-CV케이블	16㎟ × 3C	m	-	140	(증)	140
5	0.6/1kV F-CV케이블	50㎟ × 1C	m	140	-	(감)	140
6	F-CVV-SB케이블	2.5㎟ × 10C	m	180	30	(감)	150
7	F-CVV-SB케이블	2.5㎟ × 20C	m	-	190	(증)	190

- 각종 보험료 등 제경비 정산 필요

❍ (계측제어공사) 각종 보험료 등 제경비 정산을 위한 설계변경 필요

□ 조치방법

❍ 전기공사 : 설계변경 시행

- 공사물량 및 각종 보험료 등 제경비 정산을 위한 설계변경 실시

- 공사비 변경 내용                                          (단위 : 원)

공 종	당초	변경	증감액
도급금액	37,302,700	38.863,000	(증)	1,560,300
순공사비계	23,014,027	26,275,603	(증)	3,261,576
1.동력설비공사	23,014,027	22,130,721	(감)	883,306
2.철거공사	-	4,144,882	(증)	4,144,882
제경비	14,288,673	12,587,397	(감)	1,701,276

❍ 계측제어공사 : 설계변경 시행

- 각종 보험료 등 제경비 정산을 위한 설계변경 실시

- 공사비 변경 내용                                          (단위 : 원)

공 종	당초	변경	증감액
도급금액	82,361,600	81,829,000	(감)	532,600
순공사비계	59,780,992	59,780,992		-
1.계측설비 설치공사	59,780,992	59,780,992		-
제경비	22,580,608	22,048,008	(감)	532,600

□ 향후계획

❍ 설계변경 시행 및 변경계약 실시 후 공사준공

붙임 : 변경내역 각1부.  끝.