시  민

문서번호	공간정보과-9100
보존기간	년
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관	공간정보과장	시설안전부장
박현대	고신석	12/19 이규상
협 조
	주무관		김영혁
	주무관		박광수

2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과 심사(1차) 결과보고

2018. 12.

상수도사업본부

(공간정보과)

2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과 심사(1차) 결과보고

『2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』으로 시행한 측량 완료구간 성과물에 대한 공공측량성과 심사(1차) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제18조 및 동법 시행규칙 제22조

추진목적

❍ 공신력 있는 심사기관의 공공측량성과심사를 통해 정확도 점검 및 품질 확보

대상사업 : 2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

심사대상 : 도시기준점, 조사·탐사/측량 및 편집이 완료된 성과

(상수도시설물 753.622㎞)

심사기간 : 2018. 12. 12.~12. 18

심사방법 : 실내 및 현지심사(대상 무작위 표본추출)

심사항목 : 일반사항, 조사·탐사/측량, 정위치 편집, 구조화 편집

심사기관 : 공간정보산업협회

결과요약

❍ 대상 782.7㎞ 중 753.622㎞ 성과심사 완료

❍ 심사결과

평가항목	조사·탐사/측량	정위치 편집	구조화 편집
판 정	“적합”	“적합”	“적합”

Ⅱ		심사현황

대상사업 : 2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업개요(*********************)

구 분	중부・서부지역	동부・북부지역	강서・남부지역	강남・강동지역
용역내용	측량 및 편집 : 195.5㎞ (신설 29, 기존 166.5)	측량 및 편집 : 195.7㎞ (신설 30, 기존 165.7)	측량 및 편집 : 195.7㎞ (신설 32, 기존 163.7)	측량 및 편집 : 195.8㎞ (신설 30, 기존 165.8)
용역기간	2018. 6. 14.～2019. 3. 31.
계약금액	********	********	********	********
사 업 자	********* *******************	************* ******************	************* ********************	*********** *********************
해당사업소	중부, 서부	동부, 북부	강서, 남부	강남, 강동

성과심사현황

❍ 성과심사 대상

구 분		합 계	중부․서부	동부․북부	강서․남부	강남․강동
도시기준점		461점	91점	116점	103점	151점
지하시설물도		639도엽	156도엽	162도엽	183도엽	138도엽
연장	총연장	753.622㎞	190.326㎞	187.878㎞	186.517㎞	188.901㎞
	탐 사	658.567㎞	171.039㎞	164.409㎞	156.039㎞	167.080㎞
	실 측	53.798㎞	11.305㎞	16.623㎞	15.376㎞	10.494㎞
	불 탐	41.257㎞	7.982㎞	6.846㎞	15.102㎞	11.327㎞

❍ 사업물량 대비 성과심사율

구 분		계	중부․서부	동부․북부	강서․남부	강남․강동
심사율		96.3%	97.4%	96.0%	95.3%	96.5%
사업물량		782.7㎞	195.5㎞	195.7㎞	195.7㎞	195.8㎞
심사물량	계	753.622㎞	190.326㎞	187.878㎞	186.517㎞	188.901㎞
	전회	0㎞	0㎞	0㎞	0㎞	0㎞
	금회	753.622㎞	190.326㎞	187.878㎞	186.517㎞	188.901㎞

❍ 심사항목(기준) 및 방법 : 공공측량성과심사 규정에 의함.

[붙임1] 공공측량성과심사 기준 및 방법 요약 참조

Ⅲ		심사결과

조사/탐사 및 측량(현장) : 표본(2%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	837	806	96.3	적 합
	심도		828	98.9	적 합
중부․서부	평면	218	208	95.4	적 합
	심도		217	99.5	적 합
동부․북부	평면	188	179	95.2	적 합
	심도		183	97.3	적 합
강서․남부	평면	211	206	97.6	적 합
	심도		210	99.5	적 합
강남․강동	평면	220	213	96.8	적 합
	심도		218	99.1	적 합

조사/탐사 및 측량(실내) : 표본(20%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	1,736	1,723	99.3	적 합
	심도		1,733	99.8	적 합
중부․서부	평면	120	119	99.2	적 합
	심도		120	100.0	적 합
동부․북부	평면	571	565	98.9	적 합
	심도		571	100.0	적 합
강서․남부	평면	591	586	99.2	적 합
	심도		589	99.7	적 합
강남․강동	평면	454	453	99.8	적 합
	심도		453	99.8	적 합

정위치 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	17,546	17,545	99.9	적 합
중부․서부	5,104	5,104	100.0	적 합
동부․북부	4,125	4,125	100.0	적 합
강서․남부	3,056	3,055	99.9	적 합
강남․강동	5,261	5,261	100.0	적 합

구조화 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	17,546	17,479	99.6	적 합
중부․서부	5,104	5,092	99.8	적 합
동부․북부	4,125	4,091	99.2	적 합
강서․남부	3,056	3,035	99.3	적 합
강남․강동	5,261	5,261	100.0	적 합

결과분석

❍ 조사/탐사·측량(현장) : 적합도 평면 96.3%, 심도 98.9%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 조사/탐사·측량(실내) : 적합도 평면 99.3% 심도 99.8%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 정위치 편집 : 적합도 99.9%로 심사기준(90%) “적합”

❍ 구조화 편집 : 적합도 99.6%로 심사기준(90%) “적합”

Ⅳ		향후계획

부적합 성과 재확인 및 보완 완료 : 2018. 12. 20.까지

심사완료물량 기성시행(검사)  : 2018. 12. 20.까지

심사 및 보완완료된 DB, 사업소담당 확인 후 GIS에 신속 탑재

붙 임 : 1. 공공측량성과심사 기준 및 방법요약 1부.

2. 공공측량성과심사 결과서 각 1부.  끝.