투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(설계변경 소위원회 심의결과(조건부 승인) 통보 및 설계변경 도서 작성지시)

1.업무지시현장 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) (주)우현이앤지, 서울바이

오허브 조성 기계설비공사(2단계) (주)한국종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2018-12-19 14:12:09

3.지 시 내 용

가. 한종홍릉 제2018-1092(‘18.12.12.)호 및 ㈜우현이앤지 2018-63(’18.12.12.)호와         관련입니다.

나.‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) ’시행 중‘운영부서 요청에 의한 내부         평면 변경 및 원활한 시설관리를 위한 현장 여건 등을 반영’하기 위한 설계변경         요청사항에 대하여 설계변경 소위원회 심의결과 자문위원 의견을 반영하는 조건         으로「조건부 승인」결정 되었기에 통보하오니 따로 붙임 검토 의견서를 반영한         설계변경 자료를 작성하여 조속한 시일내 제출하여 주시기 바랍니다.

따로 붙임 : 설계변경 소위원회 심의 검토 의견서 4부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							박경철			시책사업과장					전결 12/19 임병국
협조자
시행			설비부-17846									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		3708-8647						/전송			3708-8659					/	pkc6896@seoul.go.kr												/	부분공개(5)