문서번호	건강관리과-18745
결재일자	2018.12.19.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		가정건강팀장		건강관리과장	보건소장
김지우		임순자		김혜심	12/19 代장완수
협조
	보건위생과장		장완수
	예산팀장		장영교

★ ◉

성동 산모건강증진센터 설치 예산 사고이월 계획

2018. 12.

(건강관리과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 ☑ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 ☑
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:	유 ☑ ( 건강증진과 ) 무 □
		●	기업	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 : □
	● 중점 홍보사항 □
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

성동 산모건강증진센터 설치 예산 사고이월 계획

『성동 산모건강증진센터』의 원활한 설치 및 운영을 위해 보건소 청사 보수 공사 선행 후 인테리어 공사가 시행되어야 하므로 연내 예산 집행이 불가하여 사고이월 처리하여 2019년 설치 추진하고자 함

□ 사업 근거

- 성동 모자건강센터 설치․운영 계획 (건강관리과-7321호 (2017. 4. 28.))

- 성동 산모건강증진센터 인테리어 공사 시행 계획 (건강관리과-16971호 (2018. 11. 15.))

- 성동 산모건강증진센터 시설비 낙찰차액 사용 계획(건강관리과-18717호 (2018. 12. 18.))

**********************사유

- 보건소 청사 보수공사 선행 후 산모건강증진센터 인테리어 공사가 시행되므로

11월 발주된 인테리어 공사 추진이 2019년 1월 중 추진 예정으로 2018년

예산집행이 불가하여 2019년 사업 추진코자 함

□ 사업 개요

- 사 업 명: 성동 산모건강증진센터 인테리어 공사

- 위    치: 서울 성동구 마장로23길10(보건소 4층)

- 면    적: 지상 1개층 332.4㎡

- 사업내용: 보건소 4층 서울시 지방경찰청 유실물센터 일부를 건강관리존, 발달

체험존, 나눔소통존 등으로 결합된 모자건강센터로 리모델링

- 운영시설: 모유수유실, 초음파 및 건강검진실, 성인접종실, 영유아 건강검진실,

영양플러스, 커뮤니티 방 등

- 사고이월 예산: 140,000천 원(시비 100%)

※ 총 사업비: 150,000천 원 중 10,000천 원(설계비용) 지출

※ 공사 계약에 따른 낙찰차액 포함하여 사고이월

□ 추진경과

- 2017. 4. 26.: 서울시 『모자건강센터 설치 지원』 공모 선정 및 예산 확보

- 2017. 11. 7. ~ 12. 22 보건소 구조안전진단(내진성능평가 포함 용역)

- 2018. 4. 12. 성동구보건소 청사 보수공사 추진 계획 수립

- 2018. 5. ~ 6. 산모건강증진센터 인테리어 설계용역 완료

- 2018. 9. 3. 서울시지방경찰청 4층 유실물센터 임시 이전

- 2018. 9. 28. 보건소 청사 보수공사 설계용역 완료

- 2018. 9. ~ 10. 보건소 청사 보수공사 발주 및 공사업체 선정 완료

- 2018. 10. ~ 11. 보건소 청사 보수공사 시행

- 2018. 11. ~ 12. 성동 산모건강증진센터 인테리어 공사업체 발주 및 업체 선정

************************ : 140,000천원

○ 세부내역

부서 : 건강관리과					예산액(단위:천원)
정책․ 단위(회계)․세부사업.편성목
	정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
		단위사업: 모자보건사업
			세부사업: 모자건강센터 설치 및 운영사업(보조)		시 140,000
				편성목: 시설비 및 부대비(401)	시 120,000
				통계목: 시설비(01) 1) 산모건강증진센터 인테리어 공사비 94,906천원*1식 1) 아트월 및 싸인몰 설치비 25,094천원*1식	시 120,000
				편성목: 자산취득비(405)	시 20,000
				통계목: 자산및물품취득비(01) 1) 오감발달놀이 물품구입 5,000천원*1식 1) 모유수유공간(탁자, 음향 등) 5,000천원*1식 1) 실내공기청정기 500,000원*4대 1) 나눔공간 기자재(빔프로젝트 등) 5,000천원*1식 1) 아기침대 1,000천원*2대 1) 신장, 체중측정기 1,000천원*1대	시 20,000

*

**********************

- 2018. 12. : 산모건강증진센터 인테리어 공사 업체 선정

- 2019.  1. ~ 3. : 산모건강증진센터 인테리어 공사 착공 및 준공

- 2019.  4. ~ 5. : 산모건강증진센터 집기류 구매 및 청소

- 2019.  6. ~ 7. : 산모건강증진센터 개소식 및 운영.  끝.