＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 변경 계약 체결-광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역

1. 배수과-9875호(2018.12.19.)와 관련입니다.

2.‘광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역’건의 계약상대자와 아래와 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 건명 : 광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역

나. 계약상대자 : **********************

다. 계 약 기 간 : 2018. 7.25.~ 2019. 7.30.(금차 : 2018. 7.25.~ 2018.12.31.)

라. 계 약 금 액 : 금1,080,500,000원(금차 : 500,000,000원)

마. 변 경 내 용 : 완수일자 변경

구분	당초	변경	비고
총완수일자	2019. 7.30.	2019.12.31.	154일 연장
금차완수일자	2018.12.31.	2019. 5.31.	151일 연장

바. 변 경 사 유

- 광암배수지 배수관로 조사결과를 설계에 반영하기 위한 소요기간 필요

붙임: 용역변경계약서(초안) 및 관련서류 각 1부.  끝.

주무관	박상진		재무회계과장	김분숙		요금관리부장	조세연		상수도사업본부부본부장	12/19 代이상국
협조자
시행	재무회계과-16264	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 3층 (합동)	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/	chadol2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)