<양식1>

용역계약(설계변경) 심사요청서

부분공개(7)

시 행	시설과-11905
시행일자
수 신 자	재무회계과장
접수번호
접수일자

주무관		시설과장	시설안전부장			결재
김기봉		代최이영	12/19 이규상
협 조

공 사 명

낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역

요청기관

시설안전부

시설과

공사위치

서울특별시 종로구 낙산5길 17-14(창신동 23-320)

공사기간

총차분 : 2018. 3. 13. ~ 2020. 07. 31.

(1차분 : 2018. 3. 13. ~ 2018. 12. 31.)

공사금액

구분	당초	변경	증감액	비고
총차분	***********	************	************
1차분	***********	***********	************

설 계 자

․ 상 호 : 시설안전부 시설과 김기봉 (전화번호 : 02-3146-1495)

◦ 공사개요

- 당 초 : 폐콘크리트 495㎥, 폐아스콘 142㎥

- 변 경 : 폐콘크리트 705㎥, 폐아스콘 142㎥, 건설폐토석 747㎥

◦ 증감사유

낙산배수지 기초터파기 공사중 매립 폐콘크리트(210㎥) 및 폐토사(747㎥) 발생

(실정보고 승인 시설과-5544)

◦ 첨부 서류

1. 설계변경 내역서 1부. 2. 기타 심사에 필요한 서류.

	시설안전부장

본문내용을 입력하세요