＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경에 따른 계약의뢰(군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사)

1. 급수운영과-31478(2018. 12. 19.)호와 관련한 사안입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인『군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사』에 대하여 설계변경 (제1회, 최종)을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

나. 계 약 자: ㈜포제이스 건설  대표 정선태

다. 공사기간: 2018. 5. 28.~2018. 12. 23.

라. 설계변경 사유: ********************

마. 설계변경 금액 내역                                                  (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감
도급비	공 급 가 액	809,150,764	839,100,000	증	29,949,236
	부가가치세	80,915,076	83,910,000	증	2,994,924
	계	890,065,840	923,010,000	증	32,944,160

바. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 송배수관 정비)

붙임  1. 설계변경 시행 및 심의위원회 개최 결과서 각 1부.

2. 설계변경 도면 및 내역서 각 1부.

3. 설계변경 관련자료(제비율 검증서 등) 각 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이훈재		급수설비팀장	권기섭		급수운영과장	12/19 송근호
협조자
시행	급수운영과-31494	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 (행당동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2750	/전송	3146-2789	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)