“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	계약 변경 요청(계약금액 및 준공기한 변경)-개봉고가 성능개선 실시설계용역

1. 교량안전과-22092(2018.12.17.)호와 관련입니다.

2.  우리 시에서 시행하고 있는 「개봉고가 성능개선 실시설계용역」의 계약금액 조정 및 준공기한 연기를 위해 계약 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 개봉고가 성능개선 실시설계용역

나. 용역기간 : 2017.6.1. ~ 2018.12.31.

다. 도 급 액 : 668,816,700원

라. 도 급 사 : ㈜경동엔지니어링 외 2

마. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 중차량노선 시설물 성능개선, 시설비

바. 계약 변경사유

- 철도구간 심의 의견 반영을 위한 추가 검토기간 소요

사. 계약 변경내역

1) 계약금액 조정                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감액	비 고
용역비	668,816,700	678,918,910	증)10,102,210

2) 계약기간 변경

- 당 초 : 2017. 6. 1. ~ 2018. 12. 31.

- 변 경 : 2017. 6. 1. ~ 2019.  2. 28.(2개월 증)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	김용태		교량기획팀장	박동욱		교량안전과장	12/19 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-22297	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	2133-1947	/전송	2133-1429	/	polar68@seoul.go.kr	/	부분공개(5)