문서번호	시설보수과-10135
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
최지락		신동헌	12/19 이학구
협조
	주무관		代김종성

2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)

설계변경(2회-정산) 검토 보고

2018. 8

서부도로사업소

(시설보수과)

2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)

설계변경(2회-정산) 검토 보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 ‘2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역’에 대한 설계변경(2회-정산) 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)

○ 용역기간 : 2018. 5. 25 ~ 2018. 12. 31

○ 용역규모 : 폐기물 운반 1,491㎥, 폐기물 처리 3,405톤

○ 계 약 자 : ㈜태현 대표 신상칠 / (유)도성개발 대표 윤칠중

○ 계약금액 : 89,277천원

□ 주요 추진경위

○ 2018. 05. 24    : 용역 계약 및 착수

○ 2018. 05. 29    : 건설폐기물 처리계획 신고(마포구)

○ 2018. 6월~12월 : 건설폐기물 운반 및 처리

○ 2018. 08. 06    : 설계변경(1회) 시행

□ 설계변경 검토

○ 설계변경 내역(물량증감 세부내역은 붙임 변경내역서 참조)

구 분		당 초	변 경	비 고
총용역비		**********	**********	************
도급비	공급가액	**********	**********	************
	부 가 세	*********	*********	*************
	계	**********	**********	************

- 예산과목

① 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(*********)

② 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

③ 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 녹번천복개보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

④ 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 욱천복개2구간 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

⑤ 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 성산지하차도 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(*********)

⑥ 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 중차량노선 시설물 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

○ 설계변경 사유

- 일상유지보수공사 및 단위공사 시공수량 증·감에 따른 폐기물량 정산

- 증산교 성능개선공사 시행 및 준공에 따른 정산물량 반영

□ 조치의견

○ 각 공사 시공수량 정산에 따른 「2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역」 설계변경 정산 시행코자 함.

붙임 : 1. 폐기물처리용역 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 각 공사별 방침서 각 1부.

3. 각 공사별 설계변경(정산) 내역서 각 1부. 끝.