문서번호	정수운영과-10714
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
장주현		정선교	12/19 代정선교
협조	주무관		김덕기
	주무관		강석규

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2018년 정수시설 청소용역 2차(최종) 정산 및 변경계약 보고

2018. 12.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

2018년 정수시설 청소용역 2차(최종) 완료 및 변경계약 보고

『2018 광암아리수정수센터 청소용역』에 대한 2차 청소작업(최종)이 완료되어  보험료 사후정산에 따른 계약변경을 실시후 아래와 같이 준공처리하고자 함

1		정수시설 청소용역 개요

□ 용 역 명 : 2018년 광암아리수정수센터 정수시설 청소용역

□ 용역기간 : 2018. 4.6 ~ 2018. 12. 31

□ 용역내용  : 정수지 등 주벽청소(66,424㎡), 침전지 슬러지청소(3,304㎥)

□ 도 급 비 : 166,111,379원

□ 도 급 자  :(주) 청우티에스  대표 이행호

2		2차 청소용역 확인점검 결과

□ 점검대상 : 2차(최종)청소 정산물량

□ 청소기간 : 2018. 8.20. ~ 12.14(금)

□ 점검방법 : 청소상태 및 주변정리 여부 등

연번	점 검 위 치	작 업 내 용	청소 적정성	비 고
1	착수정	청소 및 슬러지 제거	적 정	청소상태 확인
2	혼화지 및 침전지	청소 및 슬러지 제거	적 정	“
3	여과지 및 대수로	벽체 청소	적 정	“
4	활성탄흡착지	벽체 청소	적 정	“
5	정수지	벽체 청소	적 정	“
6	고도처리 회수조	벽체 청소	적 정	“
7	배출수지 및 방류수조	벽체 청소	적 정	“

□ 점검결과 : 정수시설청소용역 확인결과 작업지시 내용과 같이 적정하게 완료되어 전반적으로 청소상태 양호함.

○ 점검사진

침전지	침전지

3		청소용역 준공물량 현황

공 종	규 격	단위	청소용역 물량			합계	청소내용
			계약	1차기성 (6월준공)	2차기성
정수지	물사용	㎡	66,424	40,791	25,633	66,424	세부준공 사진
침전지	물사용	㎡	61,688	26,588	35,100	61,688	〃
기타정수시설물 (혼화지등)	물사용	㎡	64,008	24,855	38,333	63,188	여과지1-2지미시공
슬러지청소		㎥	3,304	1,269	2,035	3,304	세부준공 사진

4		조치의견

□ 보험료 정산 금액(8,832,874원,국민건강,연금,노인장기요양보험)

및 여과지1-2지 청소 미실시 금액 (350,960원),일반관비비

및 이윤 감액(2,576,685원)합계금액 11,760,519원 정산처리

하여 변경계약하고자함

※ 여과지 1-2지는 폭우(8월28일)로 고탁도(85NTU) 발생, 미실시함

□ 변경계약 금액 일억 오천사백삼십오만팔백육십원(154,350,860원)

□ 용역완료 현장에 대한 점검결과 청소상태가 양호하다고 판단되어

변경계약후 2차기성(최종) 준공처리 하고자 함

붙임 : 1. 변경내역서         1부

2. 합의서             1부.끝.