투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(최종) 변경 계약 요청(하천시설 유지관리 및 개선공사 외 1건 건설폐기물처리용역)

우리과에서 시행중인 「하천시설 유지관리 및 개선공사 외 1건 건설폐기물처리용역」을 아래와 같이 설계변경하였기에 변경 계약 요청합니다.

1. 용 역 명 : 하천시설 유지관리 및 개선공사 외 1건 건설폐기물처리용역

2. 용역규모

- 폐기물 운반 1,605㎥, 폐기물 처리 3,703톤

3. 용역기간 : 2018. 3. 29. ~ 2018. 12. 31

4. 용 역 사 : 정일산업(주) 대표 박상만

5. 설계변경 사유 : 공사 수량 정산에 따른 변경

6. 변경금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총용역비	77,643,600	102,900,000	증)25,256,400
공급가액	70,585,091	93,545,454	증)22,960,363
부가가치세	7,058,509	9,354,546	감)2,296,037

붙임 1. 설계변경 시행보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	석기철		주무관	김연배		시설관리과장	12/19 한흥태
협조자
시행	시설관리과-3139	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-24) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	skc7571@seoul.go.kr	/	부분공개(5)