“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행 및 계약 의뢰(잠실대교 보수공사 외 1개소 건설폐기물 처리용역)

우리부서에 시행중인『잠실대교 보수공사 외 1개소 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 잠실대교 보수공사 외 1개소 건설폐기물 처리용역

2. 용역기간 : 2018.05.14. ~ 2018.12.31

3. 계 약 자 : ㈜강동환경 외 1개사

4. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비고(증·감액)
총용역비	31,717,000	38,620,000	증)	6,903,000
공급가액	28,670,000	35,109,091	증)	6,439,091
부가가치세	2,867,000	3,510,909	증)	643,909
이전비 (폐기물처리분담금)	180,000	-	감)	180,000
도급비	31,537,000	38,620,000	증)	7,093,000

5. 설계변경 사유 : 시공 물량에 대한 건설폐기물 정산내역 반영

6. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 잠실대교 보수공사, 시설비및부대비, 시설비(금35,120,000원)

- 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 한남대교 보수공사, 시설비및부대비, 시설비(금3,500,000원)

붙임 1. 설계변경 시행계획보고 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	장재연		강구조교량팀장	정회평		교량안전과장	12/19 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-22251	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-1962	/전송		/		/	부분공개(5)