문서번호	공원사업과-2570
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원사업과장	공원부장		한강사업본부장
유충현	송경수	김인숙		12/19 윤영철
협 조

“밤섬 생태관찰데크 조성”

기본 및 실시설계 용역 준공(변경)보고

2018. 12.

공 원 부

(공원사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

“밤섬 생태관찰데크 조성”

기본 및 실시설계 용역 준공(정산)보고

밤섬생태관찰데크 조성사업 기본 및 실시설계용역이 완료되어 정산 준공하고자 함

Ⅰ		사업개요 및 추진경위

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포 당인리발전소 앞 한강변

○ 사업규모 : 생태관찰데크 276m(폭 5.0m), 보행연결로 ① 150m(폭 3.0m), ② 180m(폭 4.0m), 인공식물섬(플로팅매트)1,000㎡

○ 용역기간 :  ’17. 08. 02 ~ ’18. 12. 21(16.2개월)

○ 용 역 비 : 295백만원

○ 용 역 사 : ㈜건축사사무소 매스 스터디스 대표 조민석외 1

□ 추진경위

○  ’15.10.29 : 한강자연성회복 및 관광자원화 종합추진계획(행정2부시장)

○  ’16.07.20 : 지명설계공모

○  ’16.12.07 : 공모심사 및 선정(당선자 : 조민석)

○  ’17.07.12 : 밤섬생태관찰데크 현안업무 보고(행정2부시장)

○  ’17.08.02 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수

○  ’18.03.15 : 공유재산심의 상정(결과 - 적정)

○  ’18.09.05 : 시의회 공유재산 관리계획 심의결과(안건삭제)

○  ’18.10.12 : 관광자원화 부시장보고(보류)

○  ’18.12.10 ~18 : 설계경제성 심사(VE)(계약심사과)

Ⅱ		정산 및 준공내역

□ 용역정산내역

○ 준공금액 : 감1,070천원

(단위 : 원)

구 분		변경(전)	변경(후)	증·감	사 유
①+②+③+④총용역비		400,000,000	385,721,590	-14,278,410
설계비 ①	도 급 액	294,500,000	293,430,000	-1,070,000	∙ 자문비 정산감액
	공급가액	267,730,000	266,760,000	-970,000
	부 가 세	26,770,000	26,670,000	-100,000
② 국내외 지명공모비		83,366,590	83,366,590	0	‘16.12.20지급
③ 설계(VE)검토비		8,925,000	8,925,000	0
④ 미집행액		13,208,410	0	-13,208,410

□ 설계 경제성(VE)검토비 지급계획

○  설계경제성(VE)검토기간 : ‘18.12.10~12.18(8일)

- 총소요 심사기간(VE검토+계약) : ‘18.12.10~’19.1.10(32일 소요)

○  소요금액 : 8,925천원(외부위원 수당)

- VE리더 1명(기술사+보고서 작성)  : 2,448천원

- 검토위원 5명(기술사)              : 5,655천원

- 진행보조요원(중급기술자)           :   822천원

- 예산과목 : 한강관광자원화, 밤섬생태관찰데크조성, 시설비(100-401-01)

※ 근거 : 계약심사과–18953(‘18.11.29, 설계 VE위원수당 지급기준 개선계획)호에 따라 위원별 무통장 입급

□ 설계주요 공종 현황

○  공사비 : 11,760백만원

주요공종		단위	수 량	금액 (백만원)	비고
계				11,760
선박공사	푼툰+도교(폭 8.4m)	m	280	2,791
	상부(PC구조물, 2층)	m	307	1,064
	난간 및 철물도장	1식	280	480
	계류시설(윈치시스템)	개소	10	1,157
	준성공사 등	㎡	1,1882	452
토목공사	보행로①,②	m	330	1,098
	플로팅메트 등	㎡	1,000	388
	부대공(간판 등)	1식		214
전기공사	구조물 가설	1식		312
제잡비		1식		3,804

Ⅲ		향 후 계 획

○ ’18.12.18 : 설계경제성(VE)최종검토(계약심사과)

○ ’19.01.02 : 설계도서 수정본 제출

○ ’19.01.10 : 설계VE공사원가 통합심사 결과 통보 및 최종납품

붙 임 : 1) 변경내역서 1부.

2) 성과품 납품제출 목록 1부.  끝.

○ 위 치 도

○ 조 감 도