“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(1회-정산) 시행 및 계약의뢰(2018년 금천교 보수공사)

1. 교량안전과-22200(‘18.12.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 과에서 시행중인 “2018년 금천교 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회-정산)을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2018년 금천교 보수공사

나. 공사기간 : 2018. 5.10. ~ 2019. 1. 4.

다. 도 급 자 : ㈜광림이엔지 대표 박남구

라. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	1,004,806,000	952,154,200	(감) 52,651,800
도 급 비	676,683,000	796,769,000	(증) 120,086,000
관 급 비	121,083,000	136,938,200	(증) 15,855,200
이 설 비	207,040,000	18,447,000	(감) 188,593,000

마. 예산과목 :  교량관리, 일반교량관리, 금천교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경사유 : 공사물량 증감 및 신규공종발생 등에 따른 정산설계 변경

붙임 :  1) 설계변경(1회-정산) 검토보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	서성만		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	12/19 김종호
협조자	계약총괄팀장	김민완
시행	교량안전과-22294	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개