“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약 의뢰(수색교 등 3개소 성능개선 실시설계용역)

1. 교량안전과-22163(2018.12.18.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행 중인『수색교 등 3개소 성능개선 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 수색교 등 3개소 성능개선 실시설계용역

나. 용역기간 : 2018.7.23. ~ 2019.3.19

다. 용역업체 : 주식회사 한맥기술 외 1

라. 설계변경 사유

- 수색교 하부 철도시설 관련기관 협의 지연에 따른 용역기간 연장

- 교량 성능개선을 위한 기초부 조사 추가 시행에 따른 용역금액 변경

마. 설계변경 내역

**************************************************************************************************************************************

바. 예산과목

- 안전총괄본부 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 중차량노선 시설물 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 변경 설계내역서 1부.

2. 과업내용서(변경) 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.

5. 설계변경 방침서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	이민호		교량기획팀장	박동욱		교량안전과장	12/19 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-22337	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02)2133-1946	/전송	02)2133-1429	/		/	부분공개(5)