투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차) 시행 - 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인『2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

2. 계약기간 : 2018. 03. 05. ~ 2018. 12. 31.

3. 계약금액 : ************

4. 계 약 자 : ㈜천일건설  대표 황기진

5. 설계변경 내역

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	***********	*************	**************
도 급 비	***********	***********	**************
관급자재비	***********	***********	**************

6. 설계변경 사유

가. 제비율 정산 : 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 건설기계 대여대금지급보증서, 퇴직공제부급비 등 정산

나. 추가 예산 재배정사업 연간단가 업체에 포함하여 시공하고 작업완료분에 대하여 공사비 증액

- 2018년 도로교통소통 개선사업 시행계획 보고(장충체육관 앞)(도로보수과-3224, 2018.4.6.)

- 2018년 도로교통소통 개선사업 시행계획 보고(퇴계로)(도로보수과-3759, 2018.4.29.)

- 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 사업시행 계획보고(구)YTN앞 등)(도로보수과-6302, 2018.7.11.)

- 2018년 주행유도선 확대설치 관련 추진계획보고(도로보수과-6507, 2018.7.18.)

- 2018년 보행자 무단횡단 교통사고 예방을 위한 교통사망사고 줄이기사업 시행계획(도로보수과-6965, 2018.8.1.)

7. 예산과목

가. 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 노면표시 도색 및 제거, 시설비*************

나. 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통 개선, 시설비*************

다. 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비*************

라. 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 주행유도선 확대설치(시민참여), 시설비*************

마. 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고 줄이기 사업, 시설비**************

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고서      1부.

2. 변경설계서 및 내역서  각 1부.

3. 계약금액 조정 검증확인서 1부.

4. 설계변경 관련공문        1부.  끝.

주무관	이득규		도로보수과장	강종훈		서부도로사업소장	12/20 代강종훈
협조자	주무관	이상하		주무관	정동현		관리단속과장	代신오기
시행	도로보수과-11801	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/	ap0522@seoul.go.kr	/	부분공개(7)