문서번호	교량안전과-22398
결재일자	2018.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
김태형		손창익	12/20 김종호
협조

2018년 교량시설물 일상유지 보수공사(강북)   설계변경(2회, 정산)검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

2018년 교량시설물 일상유지 보수공사(강북)

설계변경(2회, 정산)검토보고

『2018년 교량시설물 일상유지 보수공사(강북)』설계변경 사항에 대한 감리 검토 의견서가 제출되었기에 내용을 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2018년 교량시설물 일상유지 보수공사(강북)

○ 공사기간 : 2018.01.22 ~ 2018.12.31

○ 공 사 비 : 1,500,000천원

- 도급비 1,350,000천원, 관급비 100,000천원, 이전비 50,000천원

○ 공사내용

- 표면보수1,715㎡, 단면보수88㎡, 강재보수공225경간, 도장보수공 613㎡ 등

○ 계약상대자 :자암건설(주) 대표 박병국

□ 보고내용

○ 관련공문 : 감리단 설계변경 검토의견서【감리 18-1363호(2018.12.19)】

○ 설계변경 근거

- 작업요청서 : 제1차 ~ 제17차

- 설계변경 자문회의 결과보고 : 교량안전과-22334(‘18.12.19)

○ 설계변경 검토의견 주요내용

- 작업요청서(1차~17차)의 작업완료 정산 수량 및 공사비를 반영하여 제2차 설계변경(정산)시행

- 기타 제경비 및 공사물량 정산 등

○ 주요공종 수량변경 현황

주 요 공 종	단 위	공 사 수 량
		당 초	변 경	증·감
철거 및 포장 보수	㎡	*	***	***
방 수 공	㎡	*	***	***
신축이음보수	m	*	****	****
균열보수	m	**	****	****
표면보수	㎡	*****	*******	*****
단면보수	㎡	**	****	*****
강재보수	경간	***	*******	*******
도장보수	㎡	***	*****	****
난간보수	m	**	**	**
부대공	식	*	*	*

○ 공사비 증·감 현황

구 분	공 사 비 (원)
	당 초	변 경	증·감
총 공사비	*************	*************	************
도 급 비	*************	*************	***********
관 급 비	***********	*********	***********
이 전 비	**********	*********	***********

□ 검토의견

○ 설계변경 검토보고 내용을 검토한 바, 감리단의 의견이 적정한 것으로 사료됨으로 상기 보고내용과 같이 설계변경(정산)시행코자 함.

붙임  1. 설계변경(2회, 정산) 검토보고(감리단 검토의견서) 1부.

2. 설계변경(2회, 정산)내역서 1부. 끝.