문서번호	교통운영과-21196
결재일자	2018.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
이문석		신근호	12/13 강진동
협조

- 2018년 교통안전시설물(노면표시 등) 설치공사 -

건설사업관리(감리) 용역 설계변경(정산) 보고

2018. 12.

교통운영과

- 2018년 교통안전시설 설치공사 -

건설사업관리(감리) 용역 설계변경(정산) 보고

2018년 교통안전시설물(노면표시 등) 설치공사 건설사업 관리(감리) 용역과 관련하여, 과업일수 변경으로 인한 계약금액 조정에 따른 설계변경(정산) 검토 보고임.

용역 개요

용 역 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시 등) 설치공사 건설사업               관리(감리) 용역

계약범위

권 역 별	사 업 소	자 치 구
동부권역(4개 지역)	동부도로사업소	강남구, 송파구, 강동구
서부권역(6개 지역)	서부도로사업소	중구, 용산구, 마포구, 서대문구, 은평구
남부권역(5개 지역)	남부도로사업소	동작구, 금천구, 관악구, 서초구
북부권역(6개 지역)	북부도로사업소	종로구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
성동권역(5개 지역)	성동도로사업소	중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구
강서권역(5개 지역)	강서도로사업소	강서구, 양천구, 구로구, 영등포구

계약현황

구 분	계약업체	계약금액(원)	계약일자	착수일자	준공기한	비고
동부권역	㈜건양엔지니어링	115,606,600	‘18.2.12.	‘18.3.02.	‘18.12.21.
서부권역	㈜트래픽스	118,110,000	‘18.2.02.	‘18.2.05.	‘18.12.21.
남부권역	㈜트래픽스	118,100,000	‘18.2.02.	‘18.2.05.	‘18.12.21.
북부권역	㈜건양엔지니어링	115,606,800	‘18.2.12.	‘18.3.02.	‘18.12.21.
성동권역	㈜건양엔지니어링	115,519,700	‘18.2.12.	‘18.3.02.	‘18.12.21.
강서권역	㈜건영이앤씨	115,175,000	‘18.2.05.	‘18.3.02.	‘18.12.21.

설계변경 내용

계약기간 : 변경없음

실 투입일수 정산

기관	공종	규격	투입일수		증감	비고
			당초	변경
동부권역	중급	주간	186	195	9
		휴일	15	17	2
		야간	2	-	-2
	초급	주간	186	201	15
		휴일	15	17	2
		야간	2	-	-2
서부권역	중급	주간	186	201	15
		휴일	15	10	-5
		야간	2	-	-2
	초급	주간	186	201	15
		휴일	15	10	-5
		야간	2	-	-2
남부권역	중급	주간	186	200	14
		휴일	15	7	-8
		야간	2	-	-2
	초급	주간	186	201	14
		휴일	15	10	-8
		야간	2	-	-2
북부권역	중급	주간	186	201	15
		휴일	15	18	3
		야간	2	-	-2
	초급	주간	186	201	15
		휴일	15	18	3
		야간	2	-	-2
성동권역	중급	주간	186	201	15
		휴일	15	16	1
		야간	2	-	-2
	초급	주간	186	201	15
		휴일	15	18	3
		야간	2	-	-2
강서권역	중급	주간	186	201	15
		휴일	15	8	-7
		야간	2	-	-2
	초급	주간	186	201	14
		휴일	15	7	-8
		야간	2	-	-2

※ 변경된 투입일수는 실제 투입된 일수를 합한 날자임

설계변경 내역

지 역	당 초(원)	변 경(원)	증 감(원)	비 고
계	698,118,100	724,472,800	증)26,354,700
동부권역	115,606,600	122,058,000	증)6,451,400	㈜건양엔지니어링
서부권역	118,110,000	120,722,000	증)2,612,000	㈜트래픽스
남부권역	118,100,000	117,668,000	감)432,000	㈜트래픽스
북부권역	115,606,800	124,633,800	증)9,027,000	㈜건양엔지니어링
성동권역	115,519,700	123,650,000	증)8,130,300	㈜건양엔지니어링
강서권역	115,175,000	115,741,000	증)566,000	㈜건영이앤씨

조치 계획

상기 보고내용과 같이 설계변경을 시행코자하며, 추가 소요되는 금액은 감리비 낙찰차액을 사용코자 함.

- 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 노면표시도색 및 제거, 시설비 및 부대비, 감리비(202-401-02)

붙  임 : 각 권역별 설계변경내역서 1부.  끝.