투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제5회, 최종) 시행 - 2018년 도로시설물 일상유지보수공사

1. 공사 설계변경(제5회, 최종) 시행 보고(시설보수과-9575, 2018.12.20.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중에 있는 『2018년 도로시설물 일상유지보수공사』에 대한 설계변경

(제5회, 최종)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

○ 공 사 명 : 2018년 도로시설물 일상유지보수공사

○ 공사기간 : 2018. 3. 15. ~ 2018. 12. 31.

○ 도 급 자 : ㈜태산이앤알 대표 권혁태

○ 변경사유

- 작업지시에 따른 신규공종 및 작업물량 변경(증·감) 반영

- 제경비, 관급자재비, 이전비 정산

○ 변경내역(제5회, 최종)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총공사비	2,171,798,210원	2,171,330,520원	감)467,690원
도 급 비	1,922,400,000원	1,922,400,000원	0원
이 전 비	36,653,100원	36,653,100원	0원
관 급 비	212,745,110원	212,277,420원	감)467,690원

○ 예산과목

- 도시개발특별회계, 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지보수,         시설비(980,000,000원)

- 도시개발특별회계, 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널, 복개, 지        하차도, 세척)일상유지보수, 시설비(1,191,330,520원)

붙임 : 1) 공사 설계변경(제5회, 최종) 시행 보고 1부.

2) 설계변경(제5회, 최종) 내역서

3) 계약금액조정 검증확인서 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.

주무관	홍정식		시설보수과장	오재섭		북부도로사업소장	12/20 신응수
협조자
시행	시설보수과-9576	(		)	접수		(		)
우	01137	서울 강북구 한천로 913	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5451	/전송	945-5073	/		/	대시민공개