문서번호	토목부-21700
결재일자	2018.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김동수	안규홍	代이동훈		12/20 이택근
협 조

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 -

건설사업관리용역 준공기한 연기 검토 보고

2018. 12.

서울특별시 도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 -

건설사업관리용역 준공기한 연기 검토 보고

『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계』건설사업관리(설계감리)용역자가 제출한 준공기한 연기 요청에 대하여 검토 보고 드림.

※ 제일(발)2018-4117(2018. 12. 18., 준공기한 연기요청)

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리) 용역

❍ 위    치 : 영등포구 양평동 월드컵대교 남단

❍ 용역규모 : 연결로, 교량, 접속교 보완설계

- 연 결 로 : Ramp-A ~ F 보완(폭 1차로)

- 지하차도 : 강남방향 → 교량으로 형식변경

- 접 속 교 : 종단선형 변경(연결로 계획변경 영향)

❍ 용역기간 : 2017. 8. 7. ~ 2018. 12. 31.

❍ 용역금액 : 162,235천원

❍ 용 역 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

□ 보고내용

❍ 준공기한 연기 : 90일

- 준공기한 : 당초 '18. 12. 31. ⇒ 변경 '19. 3. 31.

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미 부 과

❍ 연기사유 :「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계」용역 준공기한 변경(2018. 11. 30. ⇒ 2019. 2. 28.)에 맞추어 건설사업관리용역 준공기한을 2018. 3. 31.까지 연기하여 설계용역을 관리하고자 함.

□ 조치의견 : 보고내용과 같이 준공기한을 연기하고 건설사업관리용역 관리

붙임 : 1. 준공기한 연기요청 공문 사본 1부.

2. 변경 예정공정표 1부.  끝.