투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행-나들목 신설 및 개선공사(망원 외3) 건설폐기물처리용역

우리본부에서 시행중인 「나들목 신설 및 개선공사(망원 외3) 건설폐기물처리용역」에 대하여 설계변경(1회)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 나들목 신설 및 개선공사(망원 외3) 건설폐기물처리용역

나. 용역개요 : 공사현장 건설폐기물 처리

다. 용역기간 : ‘17.12.12 ~‘20.05.29

라. 도 급 자 : ㈜수도환경, ㈜신잔토환경

마. 설계변경사유 : 현장여건 신규물량 및 단순물량 증감

바. 설계변경 내역

(단위: 원)

1 회			비 고
당초	변경	증
90,875,000	124,323,000	33,448,000

사. 예산과목

- 치수및하천관리, 하천복원및정비, 한강관광자원화사업, 시설비(증 22,847,000)

- 치수및하천관리, 하천복원및정비, 한강관광자원화사업, 시설비-여의샛강 유지유량 확보(증 5,803,000)

- 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원접근시설유지관리, 시설비(증 4,798,000)

붙임 : 1. 검토의견서 및 보고서 각 1부.

2. 설계변경 도서(1회) 1부. 끝

주무관	서은교		치수과장	신용철		시설부장	12/20 전영주
협조자	주무관	최규석		주무관	김근섭		주무관	최혜경
주무관	김경화		총무과장	박병현		기획예산과장	기타
시행	치수과-4038	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0656	/전송	02-3780-0744	/	sek6425@seoul.go.kr	/	부분공개(5)