투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2회-정산)시행-2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)

1. 시설보수과-10135(2018.12.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)』에 대한 설계변경(2회-정산)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2018년 도로시설물 보수공사 폐기물처리용역(연간단가)

나. 용역기간 : 2018. 5. 25 ~ 2018. 12. 31.

다. 계 약 자 : ㈜태현 대표 신상칠 / (유)도성개발 대표 윤칠중

라. 설계변경 내역                                                        (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총용역비		**********	**********	************
도급액	공급가액	**********	**********	************
	부가가치세	*********	*********	************
	계	**********	**********	************

마. 예산과목(원인행위 증·감액)

① 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(*********)

② 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

③ 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 녹번천복개보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

④ 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 욱천복개2구간 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(***********)

⑤ 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 성산지하차도 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(*********)

⑥ 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 중차량노선 시설물 성능개선, 시설비(***********************)

바. 설계변경 사유

- 일상유지보수공사 및 단위공사 시공수량 증·감에 따른 폐기물량 정산

- 증산교 성능개선공사 시행 및 준공에 따른 정산물량 반영

붙임 : 1. 폐기물처리용역 설계변경 검토보고 1부.

2. 폐기물처리용역 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 공사별 방침서 각 1부.

4. 공사별 설계변경(정산) 내역서 각 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

주무관							최지락				주무관					代김종성					시설보수과장					신동헌					서부도로사업소장						12/20 代강종훈
협조자				주무관							정동현					관리단속과장							代신오기
시행			시설보수과-10186										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8381							/전송			300-8384					/														/	부분공개(5)