투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	신림선 도시철도 민간투자사업 책임건설사업관리기술자(3공구) 귀하
(경유)
제목	신림선 2공구 휴일(12/23)작업 추가 승인 알림

1. 신림선(감리3공구)2018-393(2018.12.21)호와 관련입니다.

2. 「신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사2공구)｣ 차량기지 외 4개소 긴급 휴일작업 승인요청과 관련 다음과 같은 조건으로 승인하오니 공사 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 휴일작업 승인 요청현황 (세부내용 붙임 참조)

∘ 작업일자 : ‘18.12.23(일) 주간작업

∘ 요청사유

- 차량기지 : 10span 슬라브 콘크리트 타설일정 준수를 위한 철근조립 작업

- 106정거장 : 파일천공작업 연속성 확보 및 보라매병원 이용자 불편 최소화

- 107정거장 : 주말 주변상가 영업방해 최소화를 위한 파일 천공 작업

- 106E환기구 : 터널작업 연속성 확보를 위한 대구경 강관다단 보강 작업

- 추가수직구 : 차수그라우팅 연속성 확보 및 주변상가 영업방해 최소화

나. 휴일근무 승인조건

∘ 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담

∘ 소음․먼지․통행 불편 등이 없도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의할 것

∘ 개정된 근로기준법에 따라 1주 근로 시간의 한도인 52시간을 준수토록 할 것

∘ 휴일 작업 시행 전 세부 작업계획을 수립하고 공종별 안전관리 담당자를 지정해 공사 관리에 공백이 없도록 작업장에 상주 근무하도록 감독할 것

붙  임 : 휴일작업 승인요청 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤대희		경전철1과장	代조규영		도시철도사업부장	전결 12/21 代김형건
협조자	주무관	조규영
시행	도시철도사업부-11662	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7181	/전송	02-772-7305	/	cals97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)