“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	지연배상금 부과**************

우리시와 계약한 아래 건에 대하여 계약이행이 지체되어, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조(지연배상금)에 의거 계약상대자에게 아래와 같이 지연배상금을 부과하고자 합니다.

1. 계약건명 : 「서울시 문화시설 전수조사 및 건립기준 마련 연구용역」

2. 지연배상금 : 금4,758,430원(금사백칠십오만팔천사백삼십원)

【산정내역:101,676,000원 × 36일 × 0.13% = 4,758,436.8원】

※ 계약(준공)금액 × 지체일수 × 지체상금률 = 지연배상금

3. 지연배상금 현황

********************

*******************************

************

*************************

**************************

바. 지체일수 산정 내역

계약(준공)금액	준공기한	준공일자	보완지시일 (A)	준공검사일자 (B)	지체일수 용역계약일반조건 제7절(계약이행의 지체)“1-마-1)”용역수행 기한 안에 용역목적물 ․ 용역완료보고서를 제출한 때에는 제8절 “1”에 따른 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다. 다만, 용역수행기한 이후에 제8절 “1-다”에 따른 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날부터 최종검사에 합격한 날까지의 기간(검사기간이 제8절 “1”에 정한 기간을 초과한 경우에는 같은 규정에 정한 기간에 한한다. 이하 같다)을 지체일수에 산입한다. (C) = (B–A)
101,676,000원	2018.10.31	2018.10.31	2018.11.14	2018.12.20	36

붙임 :  1. 준공검사(감독)조서 1부.

2. 부과고지서 1매.  끝.

계약전문관							신충수			계약1팀장					조현					재무과장					12/21 代문혁
협조자
시행			재무과-62331									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15															/			www.seoul.go.kr
전화		02-2133-3244						/전송			02-768-8880					/													/	부분공개(6)