＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	우면산가압장 급수체계 개선공사 설계변경 시행(총차분1회, 2차분1회)

1. 우리본부에서 시행중인 우면산가압장 급수체계 개선공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사

2) 공사개요 : 양재아리수올림터 설치 Q=209천㎥/일, 송수펌프 : 7대,

송배수관 D1,200~1,500㎜ L=535m

3) 공사기간

․ 총차분 : 2017. 12. 13.~2020. 5. 30.

․ 2차분 : 2018. 1. 1.~2018. 12. 31.

4) 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비(시설비)

5) 계 약 자 : 국정종합건설㈜ 외 1개사

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 설계변경 금액

․ 총차분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	4,654,915,000	4,894,402,000	증)239,487,000
공급가액	4,231,740,910	4,449,456,365	증)217,715,455
부가세	423,174,090	444,945,635	증)21,771,545

․ 2차분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	1,586,600,000	1,586,600,000	-
공급가액	1,442,363,637	1,442,363,637	-
부가세	144,236,363	144,236,363	-

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유 : 신공종 발생 및 물량 증감

붙임 :  1. 설계변경 도서제출 공문(건설사업관리단) 1부.

2. 설계변경 검토서(총차분, 2차분) 각 1부.

3. 설계변경 내역서(총차분, 2차분) 각 1부.

4. 합의서 1부  끝.

주무관	윤걸		시설과장	代최이영		시설안전부장	代유승효		상수도사업본부부본부장	12/21 代조세연
협조자	주무관	도근호		주무관	안희숙		재무회계과장	김분숙
시행	시설과-12060	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1494	/전송	02)3146-1529	/		/	부분공개(7)