문서번호	도시철도토목부-14967
결재일자	2018.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	12/21 정대현
협조	신호과장		代이재복
	토목1과장		代김용선

『국토교통부 주재 하남선 건설사업』

합동공정회의 결과

2018. 12.

『국토교통부 주재 하남선 건설사업』

합동공정회의 결과

『하남선(5호선 연장) 건설사업』관련 국토교통부 주재 서울시, 경기도 합동공정회의에 참석하고 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 안    건 : 하남선(5호선 연장) 1단계 건설공사 공정회의

○ 일    시 : ‘18.12.13.(목) 14:30

○ 장    소 : 철도시설공단 수도권본부 (3층 회의실)

○ 참 석 자

- 국토교통부 : 담당주무관 이형철 외 2(철도시설공단)

- 서  울  시 : 신호과장, 담당자(토목,신호)

- 경  기  도 : 철도건설과장, 하남선1팀장, 하남선2팀장, 담당자(토목,전기)

□ 회의내용

[국토교통부]

◦ H1정거장 무정차 개통시에는 2공구(H2정거장)가 CP가 되므로 제시된 공정에 따라 철저한 공정관리가 필요함

◦ 서울시와 경기도에서 후속 공정에 대한 공정표를 작성 검토 후 추가 회의 진행예정임

[경기도]

◦ 하남선 2공구 공정관리를 철저히 하여 개통에 지장 없도록 전기·소방 설비 검사필증을 발급받겠음.

◦ 종합시험운행 전 타공사 사례의 공통지적사항에 대하여 점검 및 조치 등으로 기간 단축 필요

[서울시]

◦ 임시전력설비를 추진토록 결정되어 종합시험운행 기본계획을 교통안전공단에 제출하였음(신호과장)

◦ 종합시험운행은 서울시에서 주관하고, 소방, 엘리베이터는 서울시와 경기도가 해당 구간에 대하여 시행하며 ‘20.4월 H1정거장 무정차 개통시에는 종합시험운행 이전에 소방 필증이 필요한 사항임(신호과장)

◦ 시점부 벽체 철거 관련 서울교통공사와 협의 일부공종을 주간에 작업하고 있으며, 현재 정상 추진중임

□ 조치계획

◦ 후속공사 세부공정계획 작성 국토교통부 제출

회   의   사   진

끝.