문서번호	조경과-16630
결재일자	2018.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장	푸른도시국장
김현이	석승우	代김호석	12/21 최윤종

2018년 옥상녹화 연계 태양광 설치사업 완료보고

2018. 12.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년 옥상녹화 연계 태양광 설치사업 완료 보고

옥상녹화와 연계한 태양광을 설치하여 시민 생활공간 속에서 에너지

절약과 생산이 동시에 가능한 친환경 녹색 건물을 조성코자『옥상녹화

연계 태양광 설치사업』을 완료하고 보고드림.

▢ 추진방향

○ 건물 관계자 의견을 반영하되 구조적으로 안전하게 정밀 시공

○ 태양광 패널은 가급적 기존 시설물(파고라, 그늘막 등)을 활용

○ 옥상녹화와 어울리게 설치하여 옥상녹화-태양광 연계 모범사례 제시

▢ 2018년 사업개요

○ 대 상 지 : 공단119안전센터 등 5개소

○ 사업기간 : 2018. 9. ~ 12.

○ 총사업비 : 250백만원

○ 사업내용 : 33kW 태양광 발전설비 및 인버터 설치 등

대 상 지	용량(kW)	면 적(㎡)	사업비(천원)	비 고
계	33	184	147,078
공단119안전센터	10	56	40,073
관악소방서 복지동	10	54	30,785
성산1동 주민센터	5	28	29,313
금천구청사	5	29	39,577
면목119안전센터	3	17	7,330

- 사업취소 : 3개소(모아래어린이집, 서울고등법원, 면목2동주민센터)

- 취소사유 : 건물 음영문제로 인한 경제성 부족과 하중, 방수·방근층 훼손

문제, 안전과 유지관리 문제

○ 추진경위

- 2018. 9.        : 사업계획 수립 및 시달

- 2018. 9. ~ 11. : 구조안전진단 및 설계 및 설계심의

- 2018.11. ~ 12. : 공사시행 및 준공

▢ 집행내역 : 147백만원 집행(집행률 58.8%)

구 분	예산액 (천원)	집행액 (천원)	집행잔액 (천원)	비 고
계	250,000	147,078	102,922	집행률 58.8%
시설비	237,500	136,595	100,905	집행잔액 및 예산절감(모아래어린이집 등 3개소 사업취소)
감리비	12,500	10,483	2,017

▢ 준공사진

공단119안전센터 설치전		공단119안전센터 설치후

금천구 구청사 설치전		금천구 구청사 설치후

끝.