투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(918공구 건설공사 - 총괄8회,10차1회)

우리본부에서 시행하고 있는『지하철9호선 3단계 918공구 건설공사』와 관련  건설사업관리자로부터 제출된 설계변경(총괄8회,10차1회)을 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 관리번호 : 제1*******10호

2. 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

3. 공사기간: 총괄) 2010.02.19.~2018.12.31.

10차) 2018.05.11.~2018.12.31.

4. 도 급 비: 143,297백만원

5. 시 공 사: SK건설 외 4개사

6. 감 리 사: (주)서영엔지니어링 외 3개사

7. 계약변경 내역

(단위 : 원)

구 분	계 약 금 액			비 고
	당 초	변 경	증·감
총 괄	143,297,192,700	145,140,000,000	1,842,807,300	8회
10차	6,243,192,700	8,086,000,000	1,842,807,300	1회

8. 변경사유 : 계약물량 증·감 및 보험료 정산 등에 따른 계약금액 조정

9. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도

9호선3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

붙 임 : 1. 계약금액조정 검토보고 1부.

2. 설계변경 요청(감리단) 1부.

3. 변경설계서(총괄8회, 10차1회) 각 1부.  끝.

	도시철도토목부장
★주무관	유원하		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	12/21 정대현
협조자	경리과장	이현숙		홍보예산과장	이인수
시행	도시철도토목부-14883	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층(무교동)	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7306	/	ryuoh@seoul.go.kr	/	대시민공개