문서번호	주거재생과-10169
결재일자	2018.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거재생계획팀장	주거재생과장
소석영		서정권	08/30 이동일
협조

창신숭인 도시재생기념관

전시설계 및 설치용역 설계변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

도시재생본부

(주거재생과)

창신숭인 도시재생기념관

전시설계 및 설치용역 설계변경계획

설계용역 수행 결과의 완성도를 보다 높이고자 상호합의하에 과업기간을 연장 및 용역비 증액하는 내용으로 설계변경하고자 함

□ 용역개요

○  용 역 명 : 창신숭인 도시재생기념관 전시설계 및 설치용역

○  계약기간 : 2017.12.11. ~ 2018. 8.31.

○  용 역 비 : 45,600천원

○  용역업체 : ㈜디브이씨

□ 추진경과

○  ‘17.12. 5  : 용역 시행방침

○  ‘17.12.11 : 용역계약(서울시 ↔ ㈜디브이씨)

○  ‘18. 3. 8  : 착수보고

○  ‘18. 4.18  : 중간보고

○  ‘18. 5.     : 용역기한 변경 (‘18.5.11 → ‘18.7.31)

○  ‘18. 7.     : 용역기한 변경 (‘18.7.31 → ‘18.8.31)

○  ‘18. 8. 3  : 중간보고

□ 용역 설계변경 계획

○ 과업기간 연장

당 초	변 경	비 고
‘17.12.11 ~ ‘18. 8.31	‘17.12.11 ~ ‘18. 9.28

- 연장이유 : 창신숭인 도시재생기념관 조성 공간인 창신1동 공동이용시설에 대한 공사가 유래없는 폭염에 따라 준공지연됨.

창신1동 공동이용시설 완공후 기념관 전시물설치기간을 고려하여 용역수행자와 상호합의하에 ‘18. 9.28까지 연장

○ 용역비 증액(증 9,000천원)

(단위 : 원)

구분	당 초	변 경	증감	비 고
총 용역비	45,600,000	54,600,000	9,000,000	*천원미만절사
재료비	12,250,000	13,597,315	1,347,315	물량증가 등 설계내용 반영
노무비	22,300,000	28,110,019	5,810,019
재경비	2,768,910	3,040,238	271,328
일반관리비	1,492,756	1,789,902	297,146
이윤	2,642,880	3,098,891	456,011
부가가치세	4,145,454	4,963,636	818,182

- 예산과목 : 주민중심 주민주도의 주거지재생사업 추진, 근린형 도시재생활성화사업 추진, 창신숭인 도시재생선도사업 추진, 시설비

○ 귀책사유 : 계약상대자 귀책사유 없음

○ 지체상금 : 미부과

□ 향후계획

○ 2018. 8.31  : 용역변경계약 의뢰(→ 재무과)

○ 2018. 9.28  : 전시물 설치 및 용역준공

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 변경내역서 1부.