투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	배움관 승강기(장애인겸용) 설치공사 지연배상금 부과 및 준공금 지급

1. 우리원에서 시행한『인재개발원 배움관 승강기(장애인겸용) 설치공사』관련「지방    자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제30조 및「같은법시행령」제90조에    따라 정당한 사유없이 준공기한까지 공사가 완료되지 아니하여 준공기한 다음날부터    준공검사일까지 지체일수에 대하여 지연배상금을 부과코자 합니다.

가. 공 사 명 : 인재개발원 배움관 승강기(장애인겸용) 설치공사

나. 공사개요 : 승강기(15인승, 장애인용) 설치

다. 계약금액 : 174,489,200원

라. 공사기간 : 2018. 5. 3 ~ 2018. 11. 12.

마. 계약업체 : ㈜다원디자인 대표 조서윤

바. 준공검사일 : 2018. 12. 24.(준공일 2018. 12. 21.)

사. 지체일수 : 42일

아. 지연배상금 : 금3,664,270원

〔계약금액 × 지연배상금율(0.05%) × 지체일수(42일)〕

2. 아울러, 시공자로부터 대금e바로(서울시 대금지급확인시스템)를 통해 준공금이 청구    되어 다음과 같이 지급코자 합니다.

구 분	금 액 (원)	비 고
A. 계약금액	174,489,200
B. 기지급금액	79,356,000	노무비, 장비대, 기성금 등
C. 지연배상금	3,664,270	42일 지체
D. 준공금액	91,468,930	D=A-(B+C)

끝.

주무관	최상진		시설관리팀장	이창희		인재기획과장	전결 12/26 代오세우
협조자	교육지원팀장	代남미라
시행	인재기획과-15099	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 58	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02-3488-2051	/전송	02-3488-2346	/	choikisa@seoul.go.kr	/	부분공개(6)