문서번호	건축부-18864
결재일자	2018.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김용성		차무흥	12/26 代박범규
협조

『구 북부법조단지 환경개선공사』

공사시행 계획 검토보고(2차)

2018. 12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시민생활사박물관 리모델링(증축)공사』

공사시행 계획 검토보고(2차)

「시민생활사박물관 리모델링(증축)공사」관련하여 건설사업관리기술자로 부터 제출된 2차 공사계약 요청에 대한 검토 보고 드림

1		공 사 개 요

○ 위     치 : 서울시 노원구 동일로 174번길 27

○ 규     모 : 주차장, 보행로 포함 총 사업면적 8,254㎡

○*********************************

○*********************************

○ 시 공 자 : ㈜지앤지종합건설 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소, (주)무림설계기술단

○ 현  공  정 : 공정률 34%(주차장 골조공사 중)

2		추 진 경 위

○ 2015. 8.14.: 마스터플랜 사업 검토

○ 2015.12.~2016.3.: 설계공모 및 설계안 선정

○ 2017. 8.12.: 시 투자심사 통과

○ 2017.10.16.: 건설사업 관리용역 착수

○ 2017.11.31.: 설계용역 준공

○ 2018.2.19.: 계약심사 및 일상감사 완료

○ 2018.2.23.: 입찰공고

○ 2018.3.21.: 공사계약 및 착공

○ 2018.12.10.: 1차수 공사계약 변경(공사기간 증 75일)

3		계약시행계획(2차)

○ 관련근거

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제11장 입찰유의서 제3절(계약체결)

-  시생박(건설관리) 제524호_2차수 공사계약 의뢰 요청

○ 계약금액 및 기간

*****	*******	*******	*****
*****	**************	*********************
*****	**************	*********************	*****
*****	**************	********************	*****

※ 붙임 내역서 등 관련도서 참조

○ 예산과목: [도시개발특별회계] 박물관및미술관 활성화/ 박물관 및 미술관 건립지원/                 구 북부법조단지 환경개선공사 건립/ 시설비 및 부대비/ 시설비(40101)

4		건설사업관리기술자 검토의견

○ 시공사에서 제출된 2차수 공사계약 의뢰 건 검토결과, 적정하다 판단됨

5		처리의견

○ 해당 자료 검토결과, 2차수 공사물량 및 금액이 적정하고 당초 차수계약    기간에 변동이 없으므로 건설사업관리기술자의 검토의견에 따라 2차수      계약을 의뢰 하고자 함

붙임 : 1) 2차공사 계약 검토의견 공문 1부

2) 합의각서 1부

3) 공사내역서(총괄, 2차) 각 1부.  끝.