＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(낙산배수지 건설공사)

1. 우리본부에서 시행중인 낙산배수지 건설공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 변경계약 의뢰합니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사

2) 공사개요 : 배수지 2,300㎥(송배수관 400㎜, 연장 0.6㎞)

3) 공사기간

․ 총차분 : 2017. 12. 13.~2020. 5. 30.

․ 2차분 : 2018. 1. 1.~2018. 12. 31.

4) 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비(시설비)

5) 계 약 자 : ㈜엔씨종합건설 외 1개사

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 설계변경 금액

․ 전체분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	1,977,166,000	2,094,899,000	증)117,733,000
공급가액	1,797,423,636	1,904,453,636	증)107,030,000
부가세	179,742,364	190,445,364	증)10,703,000

․ 2차분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	889,220,000	889,220,000	-
공급가액	808,381,819	808,381,819	-
부가세	80,838,181	80,838,181	-

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유 : 물가변동 반영, 신공종 발생 및 물량 증감

붙임 :  1. 설계변경 도서제출 공문(건설사업관리단) 1부.

2. 설계변경 검토서(전체분, 2차분) 각 1부.

3. 설계변경 현황설명서(전체분, 2차분) 각 1부.

4. 설계변경 내역서(전체분, 2차분) 각 1부.

5. 합의서 1부  끝.

	시설과장
주무관	윤걸		시설과장	12/21 代최이영
협조자
시행	시설과-12067	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1494	/전송	02)3146-1529	/		/	부분공개(7)